제주리사이클링센터 노후 컨베이어 교체 및 파쇄기 배출부 개선공사 “과업지시서”

2017. 05

한국전자제품자원순환공제조합

1		과업개요

1. 건명 : 제주리사이클링센터 노후 컨베이어 교체 및 파쇄기 배출부 개선공사

❍ 목    적

· 제주리사이클링센터의 노후 컨베이어 벨트(턴테이블部, 승강기部, 파쇄기 투입部) 교체를 통한 설비고장 방지 및 파쇄 원료 투입 안정화 도모

· 수직형파쇄기의 파쇄물 배출部 저장 용적확보 및 컨베이어 정량 이송를 위한 feeding system 개선을 통한 자력·비철 선별기 효율성 확보

❍ 공사기간 : 2017. 6. 14. ~ 7. 13 (계약일로부터 30일)

※ 금회 입찰공고 유찰 시 공사기간 변동 가능

❍ 배정예산 : 일금 이천육백만원정 (￦ 26,000,000, 부가세별도)

❍ 계약금액 지급계획

구 분	선수금(30%)	중도금(40%)	잔 금(30%)
지급시기	계약 체결 및 발주 후 15일 이내	설비 제작 검수 완료 후 15일 이내	시운전 완료 후 15일 이내

2. 적용 범위

❍ 본 과업은 한국전자제품자원순환공제조합에서 발주하고, 사업자단위과세 적용 사업장인 제주리사이클링센터(제주특별자치도 제주시 함선로 22)를 설치현장으로 지정한다.

❍ 본 과업의 계약당사자는 하기의 ‘상세 시공내역’을 참조하여, 시공함을 원칙으로 하며, 세부적인 시공내용에 대해서는 발주처 및 설치현장 관리자와의 협의를 통해 확정하여야 한다.

❍ 본 과업은 기존에 설치되어 있는 노후 컨베이어벨트의 철거공사 일체를 포함하며, 발주처 또는 설치현장 관리자가 컨베이어벨트 철거分에 대한 최종처분 또는 매각을 위한 협조 요청시, 계약당사자는 이에 최대한 협조해야 한다.

❍ 본 과업은 컨베이어벨트 교체에 따른 각 부분별 재질변화로 인한 모터 동력변화가 예상되므로, 이에 대한 구동모터 구매·설치 및 2차 전기배선(PLC 점검)에 관한 일체의 전기공사 일체를 포함한다.

❍ 본 과업은 파쇄기(Kubota社 KE-600; 고속 수직형 파쇄기) 파쇄물 배출部의 저장 용적확보, 컨베이어로의 원활한 이송을 위한 시스템 개선 및 환경정리를 포함하며 세부내용은 발주처와 협의 후 진행하도록 한다.

❍ 본 과업은 설비 설치에 따른 시운전을 포함하며, 반드시 1일 이상의 단동 및 연동테스트를 현장관리자(제주리사이클링센터 관리부) 감독하에 진행하여야 한다. 단, 설비의 미비점 발견시현장관리자의 판단에 따라 추가적인 시운전 참여를 요청할 수 있다.

❍ 본 과업의 설비 상세 시공내역(안)은 공제조합에서 사전 조사에 의해 작성된 내용이며, 이와 다른 형태의 설비를 제안하여도 무방하나, 설비의 설치 및 구동 목적은 공제조합의 최종 목표와 동일하여야 한다.

❍ 과업에 대한 상세내역(안)은 과업내용 중 ‘상세 시공내역’을 참고로 한다.

3. 과업의 특수성

❍ 계약당사자는 설치 및 시공 전 설치현장(제주리사이클링센터)를 반드시 1회 이상 방문하여 공사 환경을 사전에 반드시 확인하여야 한다. 미흡한 사전조사로 인한 설비 배치, 작동, 운영, 납기일 지연 등에 대한 책임은 계약당사자에게 귀속됨을 원칙으로 한다.

❍ 계약당사자로 선정된 자는 설비의 설계·제작 및 납품의 지연이 불가피 할 경우 이를 즉시 발주처에 알려야하며, 이를 알리지 않음으로 발생하는 납기일의 초과에 대해서는 공제조합 내규에 의거하여 지체상금을 납부해야 한다.

❍ 본 과업의 원활한 완료를 위해, 계약당사자는 필요시 설치현장(제주리사이클링센터)의 기존설비 시공업체와의 협업 또는 정보요청을 적극적으로 요청할 수 있으며, 발주처는 계약당사자의 정보 공유 요청에 적극적으로 응해야 한다.

❍ 계약당사자는 본 과업 완료를 위해 ‘준공도서’를 작성하여 발주처에 제출하여야 하며, 준공도서에는 다음 각 호의 항목이 반드시 포함되어야 한다.

· 납품품목 명세서(형식, 규격, 수량, 부속품·예비품·공구류 등 명시)

· 설계계산서(용량계산서, 축동력계산서, 기타 기기에 대한 계산서 등)

· 도면(배치도, 조립도, 배관시공도, 전기배선도, 제어회로도 등)

· 제작·설치 시방서(제작 및 설치를 위한 각종 기준, 재질, 절차, 유의사항 등)

· 기타 명시되지 않은 사항은 일반 준공도서 작성기준에 준하여 제출한다.

❍ 계약당사자는 설비 납품에 따른 사용법을 사용자에게 교육하여야 하며, 설치현장의 최소 1인 (설비담당자) 이상의 사용자에게 교육 이수가 완료되었음을 확인하는 ‘교육이수증’을 발급하여야 한다.

❍ 계약당사자는 본 과업에 대한 착수, 중간, 최종보고회를 개최하여 발주처에 공사 진행 현황을 공유해야 함을 원칙으로 하며, 발주처가 별도 요청할 시 추가 보고회를 개최할 수 있다. 단, 과업의 진행에 특이사항 없이 원활하게 진행될 경우 발주처 내부 논의를 통해 이를 생략할 수 있다.

❍ 본 과업 중 발생한 일반·산업폐기물 처리는 계약당사자가 주관하여 처리함을 원칙으로 하며 작업도중 건물내의 비품, 집기 등을 파손하였을시는 즉시 이를 원상복구하거나 이 사실을 발주처에 통보하여야 한다.

❍ 계약당사자는 공사 완료시 제주리사이클링센터 집무가 원활할 수 있도록 잔여 비품, 자재 및 폐기물에 대한 책임있는 정리를 하여야 한다.

❍ 기타 본 과업지시서에 기재되지 않은 사항에 대해서는 발주처, 설치현장 관리자 및 계약당사자의 상호 협의에 의해 결정토록 한다.

2		과업내용 및 계약조건

1. 과업내용

❍ 설비 내역(안)

계약당사자는 제주리사이클링센터 공장동 도면 및 현장방문을 토대로 원활한 규격의 설비가 설치되도록 노력하여야 하며, 부대설비 및 전기공사에 전 부분 시공을 포함한다.

상세 시공내역 또는 미기재 사항은 제안서 또는 협상 기간에 협의토록 한다.

항 목	내 용	규격	수량
컨베이어벨트 교체 공사	(1) 턴테이블 컨베이어벨트 교체 · 시공 前 : Roller type → 시공後 : Roller type · 스틸 재질(SS400 등)로서 롤러(Roller)형태로 제작 · 스프라켓 조합체는 먼지/오일 유입방지설계 · Roller 표면 고무코팅/우레탄 필수 (10ø) · 핀(Pin) 및 부싱(Bushing)은 경화처리 · 체인은 스프라켓과 정확히 일치하여 소음 발생 없음 · 구동모터 신규 구매·설치 (기존 모터 동력과 동일)	W1,100mm L 2,300mm ※실측필요	1식 (14+4) 주:14ea 보조:4ea
	(2) 승강기 컨베이어벨트 교체 · 시공 前 : Roller type → 시공後 : Slate type · 스틸 재질(SS400 등)로서 체인(Chain)형태로 제작 · 체인 및 스프라켓 조합체는 먼지/오일 유입방지설계 · 체인 강도는 강제품 기준 준수 · 핀(Pin) 및 부싱(Bushing)은 경화처리 · 체인은 스프라켓과 정확히 일치하여 소음 발생 없음 · 구동모터 신규 구매·설치 (1.5kW 권장)	W1,100mm L 1,800mm ※실측필요	1식
	(3) 파쇄기 투입 컨베이어벨트 교체 · 설비기준 상기 (2)항과 동일 · 지상으로부터 약 H 6200 상부 설치 필요 · 구동모터 신규 구매·설치 (2.2kW 권장)	W1,100mm L 3,200mm ※실측필요	1식
파쇄기 배출部 개선 공사	(1) 파쇄물 배출部 저장 용적확보 · 파쇄물은 배출→진동피더→ 컨베이어 순으로 이동 · 파쇄 초기 배출량이 많아 파쇄물 배출시 뭉침 발생 · 現 컨베이어(W 800) 상단에 임시 가이드 설치 中 · 약 1~2m3 용적의 파쇄물 저장(보관) 시설 필요	약 1~2m3 용적확보 ※실측필요	1식
	(2) 파쇄물 저장공간 및 풍력장치 설계 · 진동피더 및 컨베이어 상·측면 프레임(가이드) 설치 · 우레탄 재부유를 위한 컨베이어 상부 풍력장치 설치	‘ㄷ’자형 커버, 풍력장치	각 1식

❍ 공사 계획(안)

총 공사기간은 발주일로부터 30일, 기타 사항은 발주처의 의견을 반영하여 진행

자재 구매 및 가공(열처리) 기간을 충분히 제공

세부 일정은 아래와 같음 (단, 설치현장 여건에 따라 변동될 수 있음)

단계	항목	기간	공사내역	계획안 세부내용
1	구매 제작	발주일로부터 15일 이내	· 현장방문 및 답사 · 설비 세부내역 협의 (발주처) ‧ 자재 주문 및 구매 [열처리 및 가공포함] ‧ 부대설비 부품 구매·조립 ‧ 제품 검수	‧ 계약 후 선금 지급 ‧ 제작품 검수 후 중도금 지급
2	설치 시운전	발주일로부터 30일 이내	‧ 자재 운송에 따른 현장 설치 ‧ 전기공사(결선 등) 일체 완료 ‧ 시운전 및 사용자교육 ‧ 최종보고 (준공도서 제출 등)	‧ 시운전 완료 후 잔금 지급

❍ 설비 제작 및 설치

가. 컨베이어벨트 (공통)

(1) 적용기준

· 컨베이어(부대장비 포함)의 제작기준 및 안전기준은 본 항의 규정과 KS규정에 따르며, 각호에 규정된 요건보다 동등 이상임을 입증할 수 있을 때에는 발주처의 별도 승인을 득한 후 적용한다.

1) KS (Korean Industrial Standard) : 한국 산업규격

2) ISO (International Organization for Standard) : 국제표준화기구

3) IATA (International Air Transport Association) : 국제항공운송협회

4) BS (British Standard) : 영국규격

5) DIN (Deutsche Industrie Normen) : 독일규격

6) ASTM (American Standards for Testing Materials) : 미국재료시험학회

7) NEMA (National Electrical Manufacturers Association) : 미국전기제조업협회

8) IEC (International Electrotechnical Commission) : 국제전기기술위원회

9) AISC (American Institute of Steel Construction) : 미국건설협회

(2) 일반사항

· 기 설치·운전중인 폐가전제품 이송공정과 기계적·전기적 이상이 없이 연동되어야하며, 안전대책과 유지보수성이 높은 수준의 신뢰성과 가동성을 가질 수 있도록 엄격한 표준을 적용해야 한다.

(3) 연계업무

· 계약당사자는 컨베이어벨트의 제작, 설치, 시운전 과정을 통하여 보완 및 후속조치가 필요한 공정에 대해서는 관련업무에 대한 추가비용이 발생하지 않도록 발주처 또는 설치현장 관리자와 사업 업무 협의를 완료해야 한다.

(4) 하중

· 계약당사자는 현재 사용중인 턴테이블(90도 회전) 및 승강기(Wire 기준 6,300mm 상승)의 특성 및 최대 투입 가능한 냉장고의 최대 중량을 산정하여, 정하중, 동하중을 계산하여야 적정한 동력을 확보하여 설비 가동에 문제가 없어야 한다.

(5) 구동부 및 부속품

· 파쇄기 투입컨베이어는 2.2kW, 승강기 컨베이어는 1.5kW 모터 이상으로 권장한다.

· 턴테이블, 승강기 및 파쇄기 투입컨베이어를 구동하기 위한 모터는 제안된 사양에 맞는 컨베이어 타입을 기준으로 설계되어야 하며, 발주처에 제안한 사양과 별개로 최소 용량을 산정하여 발주처에 제출하여야 한다.

(6) 컨베이어 속도

· 현재 기동중인 컨베이어의 속도를 기준을 충족하도록 한다.

(7) 구조제한 및 설계요건

· 컨베이어벨트는 다음의 구조적 제한 요건을 수용하도록 설계되어야 한다. 그러나 이러한 이유로 컨베이어 시스템의 성능이 저하되어서는 안된다.

1) 모든 컨베이어의 상면부 공간(높이)은 별도의 언급이 없으면 설치현장의 현재 요건을 기준으로 설계되어야 하며, 부속 지지대가 필요할 경우 제작·설치하여야 한다.

2) 파쇄기 투입컨베이어 평균하중은 약 93.75kg/m를 기준으로 하며 이는, 최대 중량의 원료(폐냉장고‘ 100kg/대 기준)가 최대 3대 놓여있음을 가정한다.

3) 도면상에 별도 표시가 없다면 모든 컨베이어는 설치현장의 현재 요건을 기준으로 한다.

적용하여야 한다.

❍ 컨베이어 벨트 설치 현황 (제주리사이클링센터)

턴테이블, 승강기, 파쇄기투입 컨베이어 순으로 위치

제주리사이클링센터 교체 예정 컨베이어 배치도 (실측 필요)

제주리사이클링센터 파쇄기 투입 C/V 고도(높이) (약 6,300mm, 실측 필요)

제주리사이클링센터 승강기 도면 (실측 필요)

제주리사이클링센터 파쇄기 배출部 진동피더 및 배출C/V 고도(높이)

2. 설비 일반조건

❍ 계약당사자는 제작 시 각 공정별로 다음의 사항을 준수하여 제작하고 제작공정 및 방법은 다음과 같다.

가. 컨베이어 벨트를 제외한(컨베이어벨트 3p. 참조) 기타 부품에 대한 설계 및 제작기준은 다음 각 호중 하나를 따른다.

한국공급 표준규격(KS)

국제 표준규격(ISO, IEC, ASTM, ASME, IEEE, UL, SAE, AWS, NFPA)

일본공업 표준규격(JIS)

독일공업협회규격(DIN)

그 외 유럽(EN) 등 국제적으로 인정하는 설비 규격

나. 문자 및 기호표시

사용언어 : 본 설비에 사용되는 문자는 한글과 아라비아 숫자로 표기함을 원칙으로 하며 전문 기술 용어 등에 대해서는 영문을 병용 사용한다.

Symbol : 설계 및 제작 등에 있어서 사용되는 Symbol은 KSC에 준하며 이를 제외한 특수한 Symbol은 상기 ‘가’의 각 호중 하나를 따른다.

다. 단위

사용언어 : 본 설비의 설계, 제작, 시험, 검사등에 사용하는 단위는 MKS 단위계를 사용하며 전기량에 필요한 단위는 KSC에 준한다.

라. 설계 및 엔지니어링

다음과 같은 도면, 작업사양, 장비 구성 list, 제출서류 등은 계약당사자가 제공함을 원칙으로 한다.

1) 공급설비를 현장에 설치하기 위한 설계

2) 전기 및 배전공사를 위한 설계

3) 토건 및 Utility 공급 공사를 위한 설계

4) USER가 공급해야 할 자재 및 설비 List와 사양

5) 도면 및 자료 (소모품 포함)

마. 시운전

장비 설치 후 최종 확인 및 시운전은 계약당사가 시행한다. 시운전은 공급자의 계획에 따라 USER와 함께 실시한다.

설비 최종 설치 후, 회수테스트 및 시운전(1일 이내)을 USER와 함께 수행하는 것을 기본으로 한다.

※ 단 시운전 기간은 설치현장(제주리사이클링센터)의 요청에 따라 유동적으로 변경될 수 있으며, 공급처는 설치현장의 요구를 최대한 받아들여야 한다.

바. 교육

계약당사자는 시운전 후 USER에게 설비에 관한 전반적인 사항에 대해 교육을 실시하며, 교육인원, 기간, 장소 등에 관한 사항은 추후USER와 협의 후 결정한다.

사. 설비 안정화 지원

USER 교육 이후, 실무담당자가 현장에 배정되더라도 금회 공사 수행사업자는 설비 안정화(출장, 기술지원)에 최대한 협조하여야 한다.

계약당사자는 설비의 불안정으로 인한 운전(가동)상의 정지, 고장, 효울저하 등에 대한 문제 발생시, 이에 대한 설비의 유지·보수·수리를 위한 전문인력 지원 및 기술지원에 대한 의무를 갖는다.

아. 소모품

계약당사자는 소모품에 대한 정보 및 도면 일체를 제공하므로서, 사용자가 소모품 관리 기본계획을 수립하는데 최대한 협조하여야 한다.

3. 안전관리

❍ 공급처는 공사기간에 발생되거나 발생 예측되는 재해(공해 및 안전사고 등)에 전적인 책임을 지며, 담당자를 두어 방지대책을 사전에 철저하게 수립하여 이를 이행하여야 한다.

❍ 공급처는 공사의 시공에서 항상 세심한 주의를 하여, 모든 사람의 안전에 만전을 기하고, 사고 발생 시 신속히 현장관리자에게 보고하여야 한다.

❍ 공사 중에는 필요한 인원을 배치하여 정리, 정돈 및 안전관리에 노력하여야 한다.

❍ 중요한 시설물에 근접한 공사를 할 때는 미리 안전에 필요한 조치, 긴급할 때 응급조치 및 연락방법 등을 현장관리자와 협의하여 작성하고 이를 준수하여야 한다.

❍ 화약, 가솔린(Gasoline)등 위험물을 사용하는 경우에는, 관계법령에 따라 취급에 만전을 기할 수 있도록 대책을 강구하여야 한다.

❍ 가설물 및 중요물을 취급하는 발판은 견고한 구조로 설치되어야 한다.

❍ 공사 현장의 질서유지 및 화재, 도난 등의 사고방지에 필요한 조치를 강구하여야 한다.

4. 종합 시운전

❍ 종합 시운전은 컨베이어벨트 및 모든 부대설비의 작동 및 설치상태를 최종적으로 점검, 확인하기 위하여 실시하는 것으로 현장관리자 입회하에 설치된 모든 설비를 설계운전조건으로 연속운전상태에서 실시하여야 하며 시운전 조건 및 시험결과가 만족할 수 있는가를 확인한다.

❍ 종합 시운전 소요되는 유틸리티(전력비 등)를 제외한 기타비용(장비사용 공구, 소모성 재료비, 인건비 등)은 이 공사비에 포함돼 있으며 계약당사자가 부담한다.

❍ 계약당사자는 종합 시운전에서 컨베이어벨트의 운전(성능) 확인을 해야 하며, 최적 운전상태 조건에서 시설물 운영 부서에 인계되도록 해야 한다. 이때 최적 조건의 상태가 이루어지지 않아 시운전 기간을 연장한 경우 귀책사유가 계약상대자에게 있을 시에는 계약상대자 부담으로 최적의 운전상태가 될 때까지 시행하여야 한다.

❍ 종합 시운전이 완료되면 종합 시운전 결과보고서를 제출한다.

❍ 준공도서 제출

· 납품품목 명세서(형식, 규격, 수량, 부속품·예비품·공구류 등 명시)

· 설계계산서(용량계산서, 기타 기기에 대한 계산서 등)

· 도면(배치도, 조립도, 소모품, 배관시공도, 전기배선도, 제어회로도 등)

· 전처리 시험성적서(전처리 방법, 시험결과 명시 등)

· 제작·설치 시방서(제작 및 설치를 위한 각종 기준, 재질, 절차, 유의사항 등)

· 기타 명시되지 않은 사항은 일반 준공도서 작성기준에 준하여 제출한다.

5. 설비 인·허가

❍ 계약당사자는 컨베이어벨트, 모터 및 부대설비의 재질 및 처리시험서에 대한 정보를 발주처에 제출하여야 한다.

6. 보증사항

❍ 계약당사자는 발주처가 요구한 설비의 기준 사양을 충족하고, 이를 사전에 제안한 설계기준에 따라 컨베이어벨트의 제작, 설치에 대하여 충분한 기술검토를 하여야 하며, 기계설비의 성능에 대해서는 공급처가 전적인 책임을 진다.

❍ 본 과업을 수행함에 있어 설비 제작 및 설계 불합리성으로 성능보장이 어려울 경우 계약상대자는 지체 없이 변경요구를 할 수 있으며, 그 대안을 제시하여야 한다.

❍ 본 과업에 의하여 제작, 납품, 설치되는 물품은 준공일로부터 최소 1년간 책임 보증하여야 한다. 단, 소모품의 교체는 제외한다.

❍ 하자 보수에 대한 범위는 작동 매뉴얼 범위 내에서 가동하였음에도 불구하고 공정상의 심대한 결함이나 추가적인 가동이 불가한 경우를 말한다. 또한, 핵심부품의 결함으로 인한 설비 고장을 포함한다.

❍ 기타 명시되지 않은 사항은 일반 상관례에 준하여 보증하여야 한다.

❍ 금회공사의(협상에 의한 계약) 입찰에 참가하고자 하는 자는 입찰보증금 (입찰금액의 100분의 5이상)에 해당하는 현금, 은행보증수표, 이행보증보험증권 및 기획재정부 장관이 지정하는 유가증권 등을 입찰일시 이전까지 납부하여야 한다.

❍ 계약을 체결하고자 하는 자는 계약보증금 (계약금액의 선금[30%])에 해당하는 현금, 은행보증수표, 이행보증보험증권 및 기획재정부장관이 지정하는 유가증권 등을 계약일시 이전까지 납부하여야 한다.

❍ 공사 완료시, 계약당사자는 하자보증금 (계약금액의 100분의 10)에 해당하는 현금, 은행보증수표, 이행보증보험증권 및 기획재정부장관이 지정하는 유가증권 등을 완료보고 일시까지 납부하여야 한다.

❍ 기타 본 과업지시서에 명시되지 않은 계약에 관한 일반사항은 발주처의 ‘계약일반조건’을 따르며, 입찰 및 계약과 관련된 사항은 본 과업의 추진계획 및 ‘입찰공고 내 명시된 조건’을 우선하여 적용한다.