[재공고] 제주리사이클링센터 공장동 노후 설비 개선공사 업체 선정 계획

2016. 03. 30

한국전자제품자원순환공제조합

1		공사 개요 (공통)

□ 배경 및 목적

가. 배경 및 필요성

□ ‘13년 이후, 방문수거의 활성화와 제주도 내 건설경기 활성화로 인한 폐가전 입고량 증가

□ 입고 폐가전의 대형화, 다양화에 따른 설비의 전반적인 처리능력 향상 필요

□ 설비의 노후화(‘03년식 파쇄기 등)로 인한 재활용 공정 전반의 효율성 저하 심각

□ 전처리-파쇄기-선별기 공정 개선을 통해 처리용량 확대 및 선별효율 증대 필요

□ 우레탄 압축설비(유압계통)의 노후화로 인한 설비 교체 필요성 대두

□ 유가물 단가 하락으로 인한, 생산품의 고품위화 방안 마련 필요

나. 목적

□ 공장동 설비 개선

- 냉장고/세탁기 복합 재활용 공정 설계를 통한 처리 효율 향상

- 파쇄기(수직형) 도입 및 선별기(자력 & 와류) 도입을 통한 유가물 고품위화

- 냉매회수 장치 보강을 통한 지구 온난화 유발 물질 발생 최소화

- 우레탄 압축기 신규 설치를 통한 압축효율 증가 및 냉장고 재활용 설비 전반의 안정성 확보

□ 기타

- 냉장고/세탁기 복합 재활용 공정 설계를 통한 협소한 제주리사이클링센터 부지 활용 극대화

- 기술 집약형 파쇄기(수직형) 및 와전류 선별기 도입에 따른 중·소형 가전 처리 방안 마련

- 선별품목 및 처리용량 확대를 통한 RC운영 애로사항 해결

- 재활용율 향상 및 유가물 수익 증대 기대

□ 입찰에 부치는 사항

가. 공고명

□ [재공고] 제주리사이클링센터 공장동 노후 설비 개선공사

나. 범위

□ ‘공사계획서’ 참조

□ ‘공사계획서’를 바탕으로 한 도급업체(Turn key base) 선정 및 시공 방식

다. 용역기간

□ 계약일로부터 3개월

라. 공사금액(예산)

□ 일금 팔억원정 (￦ 800,000,000, 부가세 별도)

□ 본 공제조합에서 제시한 상기 공사금액(예산)을 토대로 입찰 가격 제안

마. 입찰(계약)방법

□ 공개경쟁입찰

(상기 ‘라’항을 토대로 공제조합에서 예정가격 작성 후, 제안가격 평가 방식)

바. 공고의 특수성

□ 본 공고는 ‘제주리사이클링센터 노후 설비 개선공사’의 일환으로, 사무동 공사와 동 기간에 진행됨을 유의하여야 한다. 그러므로, 공사기간에 발생할 수 있는 협의사항에 대해서는 사무동 시공업체와 최대한 협조하여야 한다.

□ 제안자는 금회 공고에 입찰하기 위해서 객관적으로 충분한 시공능력을 갖추었음을 증명하여야 하며, 공사 추진에 무리가 없음을 평가받아야 한다.

□ 금회 공사 제안을 위해 세부 Layout 작성 및 검토가 필요할 경우, 공제조합에 제주리사이클링센터에 대한 기초자료나 현장방문 허가를 요청 할 수 있다.

□ 금회 공사는 제주리사이클링센터 “공정 설계, 시공 및 안정화”를 최종 목표로 한다.

사. 지원자격

□ 공정 설계, 건축 설계, 시공, 엔지니어링 관련 업계 종사자 또는 이에 준하는 자격 취득자(사업자)

□ 당해 사업에 관한 사업자등록증을 교부받은 업체

아. 우대사항

□ 전자제품 재활용 관련 사업장 단위공정 또는 설비 시공 유경험자

□ 지리·위치의 여건을 고려하여, 향후 제주지역 A/S에 대해 충분한 대응 능력을 갖춘자

2		사업자 선정 계획 (공통)

□ 사업자 선정 개요

가. 입찰방식

□ 본 공제조합 내부규정에 근거한 공개경쟁입찰 방식

□ 본 공고일로부터 일정기간 동안 제안서 공개 공모 후, 제안서 평가

□ 선정방법 : 제안서 평가 방식 (가격평가 및 기술평가)

나. 평가방법

□ 기술평가(60%) 및 가격평가(40%)

□ 종합평가 점수 = 기술평가 점수 + 입찰 가격평가 점수

5인 이상의 자체 평가위원회 구성 및 제안서 평가

※ 단, 필요시 객관성을 겸비한 외부 자문위원 선임가능

기술평가 점수 : 유사공사 실적, 기술력, 성실성, 품질성, 안정성 등

가격평가 점수 : 예정가격을 토대로 제안가격에 따라 차등 점수 배점

□ 동점 시 처리방침

종합평가점수가 동점이면 기술평가 점수가 높은 업체를 선정

기술평가 점수도 같은 경우 배점이 높은 평가부문에서 점수가 높은 업체 선정

□ 기술평가 방법

기술평가는 제안 업체가 제시한 객관적으로 사실 자료를 근거로 평가하며,  각 업체별 제안설명회를 개최 후 평가 실시

제안서 발표는 입찰참가업체로부터 지정된 사업관리자 또는 대표자가 하여야 하며, 발표가 불가한 경우에는 서면으로 평가할 수 있다.

제안설명회의 발표순서 및 발표방법은 향후 별도 공지 예정

기술평가 점수는 평가위원이 평가한 각 항목별 점수의 최고점과 최저점을 제외한 나머지 점수의 산술평균한 값으로 산출

산술평균한 점수는 기술평가 60%(60점)의 배점으로 그대로 적용하며, 기술능력평가 분야 배점한도의 40%(40점) 이상인 자 또는 업체를 협상 적격자로 선정한다. (본 공제조합 내부 사정에 의해 일부 변동 가능)

< 기술평가 항목 >

평가항목 (60점)	세부내용	평가기준	배점
제안업체 일반 평가 (15점)	유사사업 수행경험	제안업체의 최근 1년간 관련분야 사업 수행 실적을 평가한다. [증명 가능한 실적만 제출(서식 2호) 참조]	5
	투입인력의 적정성	공사책임자(PM) 및 사업 투입되는 투입인력의 규모, 기술수준, 사업관련 이해도, 유사사업 참여 경력 등을 반영하여 평가한다.	5
	재무건전성	제안업체의 재무 건전성, 부채비율, 신인도 등에 대해 객관적으로 평가한다. [손익계산서, 재무상태표 제출]	5
설계 및 시공능력평가 (35점)	협력 방안	본 공사의 특성 및 목표에 대해 제반여건 분석과 공사의 핵심 내용에 대한 이해를 바탕으로, 공장동과 사무동 도급업체간의 유기적인 협력이 가능한지를 평가한다.	10
	사업 이해도	공사 진행에서 발생할 수 있는 위험요소 및 리스크를 사전에 예측하고 이를 분석하므로서, 예정기간 및 예산 범위 내에서 안정적인 공사를 마무리할 수 있는가를 평가한다.	5
	시공능력	제안업체가 준비한 객관적 자료를 근거로 하여, 본 공사의 Turn key 기반 공사를 완벽히 수행할 수 있는가를 평가한다.	20
사후관리 (10점)	A/S 방안	공사 후, 현장에서 발생할 수 있는 기계 및 설비의 물리 화학, 기계적 문제 발생에 대비할 수 있는가를 평가한다. (유지·보수 능력, 지리적 접근성, A/S보증기간 등)	5
	보안 요구사항	계약 체결 및 공사기간 중에도, 본 공제조합에서 요구하는 조건들에 대해 긍정적인 검토가 가능한 태도를 지향하며, 적극적인 협상자세를 임할 수 있는지를 평가한다.	5

※ 관련(유사)분야 공사 : 폐기물관리법에서 제시하는 재활용시설의 기계적 재활용 시설

[폐기물 관리법 제5조 별표3, 에 의거 압축, 압출, 성형, 주조, 파쇄, 분쇄, 탈피 시설 등]

□ 입찰 가격평가 방법

본 공제조합이 기 조사한 예정가격을 평가 기준으로 활용

입찰(제안)가격을 아래의 배점 기준에 의거하여 제안자에 배점

< 가격평가 항목 및 기준>

가격평가 (40%)	입찰(제안)가격 평가 기준
	예정가격 이하	예정가격 초과~ 100분의 3 이하	예정가격 100분의 3 초과~ 100분의 6 이하	예정가격 100분의 6 초과~ 100분의 10 이하	예정가격 100분의 10 초과~
예정가격 기준	40점	35점	30점	25점	입찰 불가

입찰가격 평가 시, 예정가격 이하 제안자에게는 만점(40점) 부여

가격평가 및 항목별 기술평가 점수가 모두 동점일 경우, 입찰(제안)금액의 최저가를 제안한 자를 선정한다.

입찰(제안) 금액이 예정가격의 100분의 10을 초과할 경우 기술평가 대상에서 제외

(가격제안서 확인 후 사전 통보)

제안업체 중 예정가격의 100분의 10을 초과하지 않은 업체가 유일한 경우에도, 기술평가 실시한다.

제안한 입찰가격이 모두 예정가격의 100분의 10을 초과한 경우에는 본 공고는 유찰되며 단, 최저 입찰(제안)금액을 제안한 업체를 우선 협상 대상자로 선정할 수 있다.

최종 계약대상자로 선정된 업체는 공제조합과 공사금액, 공사내용, 향후계획 등에 대한 세부 협의를 진행해야 한다.

□ 입찰 참가자격

가.「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제12조 및 같은 법 시행규칙 제14조의 규정에 의한 경쟁 입찰참가자격을 갖추고,

나.「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제21조 및 같은 법 시행규칙 제25조의 규정에 따라 아래에서 정한 일정수준 이상의 자격을 갖춘 기관

※「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제76조의 규정에 의한 부정당업자의 입찰참가자격을 제한 받은 자는 제외

□ 추진 일정

□ 입찰공고 : ‘16. 3. 30(수) ~ 4. 5(화)

□ 제안서 제출 마감 : ‘16. 4. 5(화) (당일 18시 이전 도착분에 한함)

□ 기술평가 (제안설명회) : ‘16. 4. 8(금)

□ 업체 선정 결과발표 : ‘16. 4. 8(금), 18시 이후 개별 통보

□ 사전 협의 : ‘16. 4. 11(월)

□ 계약 체결 : ‘16. 4. 12(화)

※ 상기 일정은 공제조합 내부 사정에 의해 변경 될 수 있음

□ 제출 서류

□ 입찰 참가 신청서(별지 1호)

□ 사업자등록증 사본 1부

□ 인감증명서 1부

□ 대리인일 경우 위임장, 신분증 지참(별지 2호)

□ 보안각서 (별지 3호)

□ 가격제안서 1부 (별지 4, 4-1호) 인감날인 후 밀봉(공사 상세 내역 포함)

□ 사용인감계(별지 5호)

□ 입찰보증금 또는 이행보증보험증권

□ 업체소개서 (서식 1, 2호 [사업실적 증빙자료, 재무상태표, 손익계산서 포함])

□ 공사제안서 (별지 6호 이용, 제안서는 자유양식)

□ 제안서의 효력

가. 제안된 제안서의 내용은 발주기관이 요청하지 않는 한 변경할 수 없으며, 계약체결 시 계약조건의 일부로 간주한다.

나. 발주기관은 제안서 제출기한 이전까지 입찰자에 대하여 추가제안이나 추가 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 갖는다.

다. 추가자료 요청 시 제안업체는 이에 성실히 임하여야 하며, 미제출시 불이익에 대한 책임은 제안업체에게 있다(제안서 검토 후 추후 통보).

라. 발주기관의 요구에 의하여 수정․보완․변경된 제안내용은 계약서에 명시되지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가짐. 단 계약서에 명시된 경우는 계약서의 내용이 우선한다.

□ 공사의 특수성

가. 금회 공사는 제주리사이클링센터의 사무동 공사와 동 기간에 진행되며, 입찰 공고가 별도로 진행되나, 공사의 목적(목표) 및 공사기간은 실질적으로 동일하므로 각각의 공사에 제안한 업체는 향후 상호 긴밀한 협조가 필요함을 반드시 숙지하고 이를 어겨 공사에 차질이나 막대한 손해를 입힐 시 이를 손해 배상 하여야 한다.

나. 금회 공사 내용 중 전기 승압 공사 (450→950KVA, 변동가능)는 사무동 전기 분·배전 공사 일정에 중요한 영향을 미치므로, 사무동 시공업체와긴밀한 협의를 통해 일정을 논의하여야 한다.

다. 본 공사는 한국전자제품자원순환공제조합 연구개발팀이 발주를 주관하는 공사이며, 공사에 대한 현장 책임자를 선임할 수 있으며, 선임된 자는 발주처와 긴밀한 연락과 상호 협력을 기본 전제조건으로 한다.

라. 금회 공사의 목표 및 추진 전략은 붙임 문서(공사계획서)를 참조하여 숙지하여야 하며 특히, 공장동 설계에 관한 사항은 본 공제조합에서 사전에 조사·제시한 내용이므로 이를 준수하여야 한다.

□ 유의사항

가. 발주처는 정해진 기한 내에 선금, 중도금, 잔금을 최대한 지급하여야 하며, 대금지급 기한을 불가피하게 맞추지 못하게 된 때에는 지체없이 도급처에게 이를 통지하여야 한다.

나. 발주처는 아래 각 호에 해당하는 경우 계약 전부 또는 일부를 해지할 수 있다.

1. 정당한 이유없이 약정한 착공시일이 경과하고도 공사에 착수하지 아니할 경우

2. 계약상대자의 책임있는 사유로 인하여 준공기한까지 공사를 완성하지 못하거나 완성할 가능성이 없다고 인정될 경우

3. 지체상금이 당해 계약의 계약보증금상당액에 달한 경우로서 계약기간을 연장하여도 공사를 완공할 가능성이 없다고 판단되는 경우

4. 계약상대자의 부도발생 등으로 정상적인 공사수행 가능성이 없다고 판단될 경우

5. 기타 계약조건을 위반하고 그 위반으로 인하여 계약의 목적을 달성할 수 없다고 인정될 경우

다. 발주처는 다음 각 호에 대해서 공사의 변경 또는 해제를 요구할 수 없다. 다만, 도급처의 사정으로 공사정지기간이 발생하고 공기의 100분의 50을 초과하였을 때는 그러하지 아니하다.

라. 제출된 제안서의 내용은 공제조합이 요청하지 않는 한 수정할 수 없다.

마. 공제조합은 제안내용에 대한 확인·검증이 필요한 경우 제안사에 입증자료를 요구할 수 있으며 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 갖지만, 입증자료를 제출하지 못할 경우는 불가능한 것으로 간주한다

바. 낙찰자가 계약 내용을 이행하지 못할 경우 손해 배상 책임을 갖는다.

사. 입찰보증금은 계약금액의 100분의 5 이상으로 현금, 은행보증 수표, 이행보증보험증권 및 기획재정부장관이 지정하는 유가증권 등으로 납부하여야 한다.

아. 낙찰자가 계약 체결하지 아니할 경우에는 입찰보증금은 공제조합에 귀속한다.

자. 계약의 성질상 하자보증이 필요하다고 인정되는 경우 또는 공제조합에서 요청하는 경우에는 공사 계약금액의 100분의 10에 해당하는 현금 또는 이행보증보험증권으로 하자보증금을 납부하여야 한다.

차. 계약상의 의무를 지체한 경우, 지체상금으로서 계약금액에 다음 각 호의 비율과 지체일수를 곱한 금액을 현금으로 납부하여야 한다. 다만, 공제조합의 사유에 의해 지체되었을 경우에는 그 해당일수는 지체일수에 산입하지 아니한다.

1. 물품의 제조, 구매 : 1000분의 1.5

2. 물품의 수리 : 1000분의 2.5

3. 용역, 가공, 인쇄 및 기타 : 1000분의 2.5

카. 제출된 제안서 및 관련 자료는 일체 반환하지 않으며, 본 제안서 작성 및 제출과 관련되는 비용은 제안사의 부담으로 한다.

타. 기타 명시되지 아니한 사항은 공제조합과 협의하여 추진한다.

# 붙임 : 1. [별지1호] 입찰참가 신청서 1부.

2. [별지2호] 위임장 1부.

3. [별지3호] 보안각서 1부.

4. [별지4호] 가격제안서 1부.

5. [별지4-1호] 세부산출 내역서 1부.

6. [별지5호] 사용인감계 1부.

7. [별지6호] 제안서(표지) 1부.

8. [서식1호] 업체현황 1부.

8. [서식2호] 용역 이행 실적 증명서 1부.

9. 공사계획서 1부. 끝.

[별지 1호]

입찰참가 신청서

공 고 번 호 : 2016-004호

계 약 건 명 : [재공고]제주리사이클링센터 공장동 노후 설비 개선공사

입찰 연월일 :

상기 계약건에 대하여 입찰공고사항, 입찰유의서 및 귀 공제조합의 계약사무처리 규정에 근거하여 입찰에 참가하고자 신청합니다.

2016.  .   .

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :            (인)

전화번호 :

한국전자제품자원순환공제조합 귀중

[별지 2호]

위      임      장

공고번호		2016 - 004호
계약건명		[재공고]제주리사이클링센터 공장동 노후 설비 개선공사
입찰년월일
대표자	성 명		생 년 월 일
	주 소
	업체명		연 락 처
대리인	성 명		생 년 월 일
	주 소
	업체명		연 락 처
상기 계약 건에 입찰 참가함에 있어 상기 인을 업체의 대표자 또는 입찰참가자의 대리인으로 위임하였음을 증명합니다. 2016년 월 일 대표자 : (인) 대리인 : (인) 한국전자제품자원순환공제조합 귀중
※ 지참서류 : 대리참석자 신분증 ※ 위임장에 사용하는 도장은 신고된 사용인감(대표자 인감도장)과 같아야 함. ※ 대리 접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 입찰참가자 본인에게 있음.

[별지 3호]

보  안  각  서

○ 공고번호 : 2016 - 004호

○ 계약건명 : [재공고]제주리사이클링센터 공장동 노후 설비 개선공사

○ 계약금액 : 금  원정(￦00-)

본인은 상기 과업을 수행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 서약하고 이에 본 각서를 제출합니다.

1. 본인은 과업수행에 있어 계약서 및 과업지시서상의 제반 보안사항을 철저히 수행할 것을 서약한다.

2. 보안사항을 외부에 누설시켜 중대한 문제점을 야기시켰을 경우에는 보안관계 제법 규정에 의거 처벌받음은 물론 어떠한 제재 조치를 취하여도 이의를 제기하지 않을 것을 서약한다.

20  .  .   .

주   소 :

상   호 :

성   명 :             (인)

한국전자제품자원순환공제조합 귀중

[별지 4호]

가 격 제 안 서
사 업 명	[재공고]제주리사이클링센터 공장동 노후 설비 개선공사
발주기관	한국전자제품자원순환공제조합
제안업체	업 체 명
	대 표 자
	주 소
사업기간	계약일로부터 3개월 간
제안금액 [VAT 별 도]	설비 제작 및 시운전	일금 원(￦ )
	기타 ( )	일금 원(￦ )
	합 계	일금 원(￦ )
상기금액으로 가격제안서를 제출합니다. 붙 임 : 세부 산출내역서 각 1부 2016년 월 일 대 표 자 : (인) 한국전자제품자원순환공제조합 귀중

※ 봉투에 밀봉하여 별도 제출

[별지 4-1호]

세부 산출 내역서 (※자체양식 가능)

(단위 : 원)
구 분	세부내용	수 량	단 가	금 액	비 고
	≀
	≀
	① 소계(만원단위 절삭)
	≀
	≀
	②소계(만원단위 절삭)
	≀
	≀
	➂ 소계(만원단위 절삭)
	≀
	≀
	➃ 소계(만원단위 절삭)
소계➄	➀+➁+➂+➃
공과잡비➅	➄* %
산재보험료➆	인건비의 ~%
고용보험료➇	인건비의 ~%
기업이윤➈	➄* ~%
소계➉	➄+➅+➆+➇+➈
부가세	➉ * 10%
총계	➉ +

[별지 5호]

사 용 인 감 계

❍ 사 업 명 : “[재공고]제주리사이클링센터 공장동 노후 설비 개선공사”위 사업에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다.

사 용 인 감

업 체 명 :

대 표 자 :                  (인)

한국전자제품자원순환공제조합  귀중

[별지 6호]

제안서 표지

[재공고] 제주리사이클링센터 공장동 노후 설비

개선공사 제안서

2016. 04

구분	공사 수행기관	참여(협력) 업체
기 관 명
대표자명
주 소
전화번호
대표자 e-mail

※ 공사 기술 및 설비 특장점을 살려 제안서 작성 (2∼3page)

[서식 1호]

업  체  현  황

업 체 명			대 표 자
설 립 일			사업자등록번호
사 업 분 야			사업장소재지
종 업 원 수			전 화 번 호
해당부문사업기간	년 월 ～ 년 월 ( 년 개월)
【주요 사업 실적(최근 1년간)】
인 력 현 황
구 분		인 원 (명)		비 고
0 0 분 야
0 0 분 야
0 0 분 야
0 0 분 야

[서식 2호]

용역 이행 실적 증명서
신청인	상 호		대표자
	영업장소재지		전화번호
	사업자번호		제출처
	증명서 용도
용역 이행 실적 내용	용 역 명
	계약금액
	용역개요
	계약일자	계약기간		이행실적			비고
				비율		실적
증명서발급 기관	위 사실을 증명함 2016년 월 일 기 관 명 : (인)
	주 소 :
	발급부서 : 담당자 : (인) 전화번호 :

※용역실적을 공동으로 이행한 경우 비율과 이행실적 기재

※타 기관에서 발행하는 전산용(실적증명원) 서식도 가능하나 위 서식의 내용을 포함해야 함

[9.공사계획서]

[재공고]제주리사이클링센터 공장동 노후 설비 개선공사

공 사 계 획 서

2016. 3

한국전자제품자원순환공제조합

1		과업개요

1. 건명 : 제주리사이클링센터 공장동 노후 설비 개선공사

❍ 목    적 : 냉장고/세탁기 복합 재활용 공정 설계 및 부대설비 공사

❍ 공사기간 : 계약일로부터 3개월 (계약체결일 변경에 따라 공사기간은 유동적)

❍ 공사금액(예산) : 일금 팔억원정 (￦ 800,000,000)

❍ 계약금액 지급계획

구 분	선수금(40%)	중도금(30%)	잔 금(30%)
지급시기	계약 체결 및 발주 후 15일 이내	착공일로부터 1개월 이후	시운전 완료 후 15일 이내

2. 적용 범위

❍ 금회 공사는 한국전자제품자원순환공제조합에서 기 구매한 ‘수직형 파쇄기(Kubota社 KE-600)’를 기반으로 하여 냉장고/세탁기 복합 재활용 공정 운영을 위한 시스템의 구축을 주요 목적으로 한다.

❍ 상기에서 ‘시스템 구축’이라 함은 냉장고/세탁기의 재활용 공정에 있어서 일반적으로 행해지는 전처리(냉매회수 포함), 선별(자력, 와전류) 및 우레탄 압축 공정을 위해 필요한 제반여건과 부대설비의 구매·설치를 일괄적으로 포함하며, 파쇄기와 연동작업 및 부하/무부하 테스트를 완료하는 것을 원칙으로 한다.

❍ 파쇄기(Kubota社 KE-600)는 본 공제조합에서 구매를 완료하여 타사 제품으로 변경될 우려가 없으므로, 상기제품에 대한 기본정보 및 설비의 특수성을 이해하여 설비 연동과 시운전 과정에서 최대한 기계적 문제가 발생하지 않도록 유념해야 한다.

❍ 본 과업에는 파쇄기의 구매 및 설치는 제외되나, 실제 설치 및 제반공사 과정 일부 업무 분담과 협조가 필요할 수 있으므로 사전에 충분히 인지하여야 한다.

❍ 본 건의 설비 공급내역(안)은 공제조합에서 사전 조사에 의해 작성된 내용이며, 이와 다른 형태의 설비를 제안하여도 무방하나, 설비의 설치 및 연동의 목적은 공제조합의 최종 목표와 동일하여야 한다.

3. 과업의 특수성

❍ 본 건은 한국전자제품자원순환공제조합의「제주리사이클링센터 노후 설비 (시설) 개선 공사 계획」의 일환으로 추진되므로, 사무동 설비 개선 공사와 동 기간에 이루어짐에 유의하여야 한다.

❍ 금회 과업 중 전기 승압공사(수전실) 및 사무동(휴게실) 전기 분전(공급) 공사 및 자재보관 등에 관한 협조가 필요한 부분은 사무동 공사의 도급처와 긴밀하게 논의하여 원만하게 공사가 진행 될 수 있도록 상호 협력하여야 한다.

❍ 상기와 관련하여, 사무동에 원활한 전기 공급이 되도록 일부 분전(50kW 내외) 설비를 추가할 수 있음을 사전에 숙지하여야 한다.

❍ 금회 선정 사업자는 전기 승압공사(수전실 증설)를 수행하고, 기 구매한 파쇄기 주 제어반까지의 전력공급(cable)을 성실히 이행하여야 한다. 단, 주 제어판의 제작·설치와 이후 전기공사는 파쇄기 구매업체에서 담당한다.

❍ 본 재공고에서는 최초 공고와 달리, 수직형 파쇄기 도입을 위한 기초 토목공사를 업무분장에서 제외하였다.

❍ 제안업체는 상기 본 공사의 특수성 및 목적을 충분히 숙지하여 성실히 용역을 수행하여야 한다.

❍ 금회 공사는 공개경쟁 입찰에 의해 도급업체(컨소시엄 가능)를 선정하여 공사를 발주하는 것을 원칙으로하며, 본 공고는 재공고이므로 유찰 시 수의계약으로 진행 할 수 있다.

❍ 기타 본 공사계획서에 기재되지 않은 사항에 대하여는 상호 협의에 의해서 적용한다.

2		과업 내용 및 계약조건

1. 과업내용

❍ 설비 내역(안)

설비 내역(안)을 토대로 수직형 파쇄기 기반의 냉장고/세탁기 복합 재활용 공정을 설계 및 시공 가능하여야 한다.

기기·장비 및 기자재와 기초공사에 대한 부분을 모두 시공할 수 있어야 한다.

전기 승압공사(수전실 증설) 및 분·배전 시공이 가능하여야 한다.

항목		장치 및 내용
①	복합 전처리 공정	· 파레트 리프트(기존) · 컨베이어[롤러(기존), 슬레이트(신규)] · 부대설비(조명, 베어링분리기, 스텐압축기)(일부신규) · 냉매 회수 장치 및 track rail C/V 설치 (신규)
②	리프트	· 리프트 이설치(기존)
③	파쇄 공정	· 파쇄기 주 제어반(판넬)까지의 전력 (cable) 공급 · 수직형 파쇄기[KE-600(750HP)]와 타 설비간의 연동 · 타 공정과 연동 후 무부하/부하 테스트 (협조)
④	선별 공정	· 자력선별기, 와전류선별기 · 부대설비(컨베이어, 워크 웨이, 유가물배출 등)
⑤	우레탄 분리·포집	· 분쇄기, 사이클론, 백필터, 저장조 · 기타 기초공사, 컨베이어
⑥	우레탄 압축기	· 압축기(처리용량 : 350kg/h)
⑦	공기 압축기	· 22kw(30HP), 15kw(20HP)
⑧	수전실 증설 및 전기·제어 (인허가 포함)	· 전기 증축 공사(450kw→950kw(변경가능)) · 전기 설비, 전기·제어 판넬 및 배선 공사 (파쇄기를 포함한 종합 PLC 설계·시공)
⑨	지붕공사	· 공장동 지붕 공사(1.5~2m 추가)
⑩	철거공사	· 기존 설비 일부 철거
⑪	콤프분해 설비	· 콤프분해설비 구매 대행 (설치 관리·감독)

❍ 공사 계획(안)

총 공사기간은 발주일로부터 3개월로 하며 기타 사항은 발주처의 지시를 따름

세부 일정은 아래와 같음

단계	항목	기간	공사내역	계획안 세부내용
1	설비 제작	발주일로부터 2개월 (‘16년 5월)	‧ 선별기 제작·구매 ‧ 우레탄 설비 제작·구매 ‧ 컨베이어 벨트 등 기타설비 제작 ‧ 수전반 증축	‧ 공정에 필요한 각 설비 제작 ‧ 수전반증축(450KVA→950KVA)
2	설치 및 시운전	제작으로부터 종료시까지 (‘16년 6월)	‧ 전기 증축 ‧ 리프트 이설치 ‧ 설비 연동	‧ 리프트 이설치 ‧ 공정 구축 ‧ 시운전

❍ 냉장고/세탁기 복합 재활용 공정

전처리공정, 수직형 파쇄기, 자력선별, 와전류선별을 기반으로 한 냉장고/세탁기 복합 재활용 공정 구성

공간 활용 극대화를 고려한 냉장고(30대/h), 세탁기(30대/h) 복합 전처리 공정 구성

냉장고 파쇄에 따른 우레탄 포집(집진장비)의 설치(2~3곳) 및 적정 집진용량 설비의 제작(구매) 및 시공

고철, 플라스틱, 비철로 선별율 90%이상 가능한 선별기

냉장고 파쇄 시 발생하는 우레탄 90%이상 처리 가능한 우레탄 설비

냉장고/세탁기 복합 재활용 선별 공정 흐름도

2. 설비 일반조건

제작 시 각 공정별로 다음의 사항을 준수하여 제작하고 제작공정 및 방법은 다음과 같다.

가. 설계 및 제작기준은 다음 각 호를 따른다.

한국공급 표준규격(KS)

국제 표준규격(KS)

일본공업 표준규격(JIS)

독일공업협회규격(DIN)

그 외 유럽 등 국제적으로 인정하는 설비 규격

나. 문자 및 기호표시

사용언어 : 본 설비에 사용되는 문자는 한글과 아라비아 숫자로 표기함을 원칙으로 하며 전문 기술 용어 등에 대해서는 영문을 병용 사용한다.

Symbol : 설계 및 제작 등에 있어서 사용되는 Symbol은 KSC에 준하며 이를 제외한 특수한 Symbol은 상기 ‘가’의 각 호중 하나를 따른다.

다. 단위

사용언어 : 본 설비의 설계, 제작, 시험, 검사등에 사용하는 단위는 MKS 단위계를 사용하며 전기량에 필요한 단위는 KSC에 준한다.

라. 설계 및 엔지니어링

다음과 같은 도면, 작업사양, 장비 구성 list, 제출서류 등은 공급자가 제공함을 원칙으로 한다.

1) 공급설비를 현장에 설치하기 위한 설계

2) 전기 및 배관공사를 위한 설계

3) 토건 및 Utility 공급 공사를 위한 설계

4) USER가 공급해야 할 자재 및 설비 List와 사양

5) 도면 및 자료

마. 시운전

장비 설치 후 최종 확인 및 시운전은 공급자가 시행한다. 시운전은 공급자의 계획에 따라 USER와 함께 실시한다.

설비 최종 설치 후, 무부하 테스트(1주일), 부하 테스트 (1~2일)을 USER와 함께 수행하는 것을 기본으로 한다.

바. 교육

공급자는 시운전 후 USER에게 설비에 관한 전반적인 사항에 대해 교육을 실시하며, 교육인원, 기간, 장소 등에 관한 사항은 추후USER와 협의 후 결정한다.

3. 상세설비 조건(안)

제작 시, 각 설비별로 그 특성과 쓰임이 다르므로 아래 사항을 준수하여 설비를 제작하여야 한다. 단, 이에 준하는 설비들로 상세설비 제작 계획(안) 수립 후, 제출 할 수 있다.

1) 전처리 설비

활용부지 최소화를 위한 냉장고, 세탁기 복합 전처리 공정 설계·시공

기본 처리용량 : 냉장고 및 세탁기 시간 당 30대 처리가능 전처리 공정 설계·시공

최대 처리용량 : 냉장고 및 세탁기 시간 당 40대 처리가능 전처리 공정 설계·시공

세탁기 전처리 : 내통압축기 및 클러치 타격기 기존설비 수리 또는 신규 구매

냉장고 전처리 : 냉매회수기 및 Track rail 등 일체 부대 설비 시공 포함

작업자 안전을 고려한 안전장치(부대시설)를 시공하여야 한다.

시공업체는 현재 운영 중인 센터 냉장고/세탁기 재활용 선별공정 현장실사를 통해 재사용이 가능한 제품의 수량과 방법을 확인하고 설계 및 견적에 반영하여야 한다.

2) 파쇄기

파쇄기는 사급품목으로 발주처(한국전자제품자원순환공제조합)에서 구매하여, 시공업체 공급하는 것을 원칙으로한다.

본 공제조합이 기 구매한 수직형 파쇄기(KE-600)의 기본 효율 및 특성은 아래 표를 참고하여 타 설비와 연동한다. 전기의 경우 파쇄기 메인 컨트롤 판넬까지의 전력(cable) 공급 및 연결을 수행하며, 추후 파쇄기 업체에서 제공하는 제어센서 정보 및 도면을 참고하여 PLC 제어반을 완성하도록 한다.

파쇄기의 화재감지, 폭발감지 센서 및 물탱크와 관련된 조작 및 제어는 파쇄기 판매업체의 업무이나, 전체 PLC제어에서 관점에서 위 센서들을 활용하여 종합제어를 완성하는 업무는 금회 시공업체의 업무로 한정한다.

파쇄기 설치를 위한 기초 토목공사는 수직형 파쇄기의 납품업체에서 일괄 계약 후 진행한다. 단, 파쇄기 및 부대시설 설치과정에서 본 공사 제안자는 파쇄기 납품업체와 긴밀히 협력하여야 한다.

<Kubota社 KE-600 사양>

항목	조건	비고
파쇄기 타입	수직형 파쇄기
투입물	냉장고, 세탁기	양문형, 김치냉장고 포함
처리용량	7.5ton/h
모터출력	280kw x 2
파쇄기 크기	5,852mmW x 2,292mmD x 9,876mmH
투입구 크기	2.0mL x 2.2mW	900리터급 냉장고 사이즈
파쇄물 크기	25mm~60mm

파쇄기는 발주처 내부 검토 및 전문가의 자문, 평가를 통해 수직형파쇄기를 선정하였으며, 파쇄기 구매 건은 별도로 진행되었으므로 금회 과업에 구매와 관련된 업무는 제외한다.

세부사양, 설계도, 전기도면 등의 세부 자료는 발주처와 협의 후 제공한다.

3) 공급피더

공급피더는 파쇄물을 겹치지 않도록 고르게 분포시켜 선별기(와전류, 비철, 플라스틱)투입하는 설비로서, 구동부는 진동세기 조절이 가능하도록 제작하여야 하며, 파쇄물 이송량을 충분히 감안하여 동력을 산정 하여야 한다.

피더의 폭(Wide)은 후단의 선별기 컨베이어의 벨트폭(Wide)과 같은 규격으로 설계하여야 한다.

피더의 길이(Length)는 폭 대비 1.2배 이상으로 설계하여야 한다.

4) 이송컨베이어

운반량을 충분히 감안하여 동력을 산정하여야 한다.

콘베이어 가대는 SS400재질의 형강과 철판의 용접구조로 제작하며, 형강은 ㄷ형강 150×50이상으로 한다.

운반롤러 및 리턴롤러는 베어링을 삽입하여 장시간 운전 시 벨트의 마모를 최소화하며 원활히 구동하도록 제작하여야 한다.

벨트는 파쇄물 특성에 맞게 고려되어야 하며, 갈색고무밸트, 흑색고무밸트, PVC벨트 등 이송물에 적합한 재질을 사용하여야 한다.

콘베이어 벨트 내부에 스크래퍼를 설치하여 벨트안의 흙이나 이물질을 콘베이어 벨트 외부로 배출하여 롤러 및 드럼에 케이크가 생기는 것을 방지하여야 한다.

시공업체는 현재 운영중인 센터 냉장고 재활용 선별공정 현장실사를 통해 재사용이 가능한 컨베이어의 수량과 방법을 확인하고 설계 및 견적에 반영하여야 한다.

(리프트 포함)

5) 자력 선별기

자력 선별기는 1.5ton/h 이상(파쇄물 기준)의 선별능력을 확보하여야 하며, 컨베이어벨트 속도 및 자력세기를 통해 선별효율의 조정이 가능하도록 설계하여야 한다.

선별 물질은 철(미립자 포함)과 비철로 구분 되어야하며, 순도 및 회수율이 95% 이상으로 한다.(와전류 선별기에 최소한의 영향을 주어야함)

납품 전 성능 테스트를 진행하여야 하며, 시료는 센터 파쇄기 파쇄물(500kg 이상)로 한다.

자사 standard sample을 이용하여 테스트가 가능하며, 테스트 결과가 요구사항에 충족하지 못할 경우 제안업체는 개선품 또는 대체품을 제공하여, 공사일정에 문제가 없도록 대응하여야 한다.

6) 와전류선별기

와전류 선별기는 1.5ton/h 이상(파쇄물 기준)의 선별능력을 확보하여야 하며,   인버터 및 디바이더를 통해 선별효율의 조정이 가능하도록 설계하여야 한다.

선별물질은 비철(구리, Al)과 플라스틱(혼합플라스틱, 전선, 기타 등)으로 구분되어야 하며, 순도 및 회수율은 90%이상으로 한다.

납품 전 성능 테스트를 진행하여야 하며, 시료는 센터 파쇄기 파쇄물(500kg 이상)로 한다.

자사 standard sample을 이용하여 테스트가 가능하며, 테스트 결과가 요구사항에 충족하지 못할 경우 제안업체는 개선품 또는 대체품을 제공하여, 공사일정에 문제가 없도록 대응하여야 한다.

7) 우레탄 포집설비

우레탄 회수(파쇄 배출물 진동피더, 자력 및 와류선별기 연결 부위 등)가 가능한 적정 위치하여야 하며, 공장동 내 먼지도 함께 제거할 수 있어야한다.

우레탄 포집이 용이하도록 구성되어야 하며, 흡입량 및 흡입구 높이 조절이 가능하도록 설계 되어야 한다.

필요시 버켓 컨베이어 상부에도 우레탄 이송배관이 연결되어야 한다.

제주리사이클링센터 공장동 면적에 적합한 크기가 되어야 한다.(처리설비 포함)

8) 우레탄 처리설비

아래 표와 같은 우레탄 처리설비 성능 이상을 보유하고 있어야함

항목	조건	비고
투입물	냉장고 내 우레탄폼
처리용량	3.5ton/day
전기용량	100HP
파쇄기 크기	제주리사이클링센터 공장동 면적에 적합한 크기 (포집설비 포함)
Main Cylinder	150 ton
보조 Cylinder	50 ton
처리물 크기	450mm×450mm×450mm 이하
기타사항	· 우레탄 포집설비와 연동이 가능한 처리설비 · 기타 먼지 제거 가능한 처리설비

9) 플랫폼

플랫폼 상부에 위치하는 모든 설비 및 장치의 하중, 가동하중 등을 고려하여 예상하중을 산정하고, 예상하중의 150% 이상을 설계하중으로 하여야 한다.

바닥은 먼지 및 이물질 낙하방지를 고려하여 체크플레이트를 적용한다.

H형강 또는 구조용 강관을 사용할 수 있으며, 안전을 우선적으로 고려하여 설계하여야 한다.

※ 시공업체는 H형강과 구조용 각관을 구분하여 각각의 견적을 제출하여야한다.

시공업체는 현재 운영 중인 센터 현장실사를 통해 재사용이 가능한 품목과 방법을 확인하고 설계 및 견적에 반영하여야 한다.

기타 신규 제작 및 설치의 필요성이 인정되는 경우 협의를 통해 설계에 반영할 수 있다.

10) 공기 압축기

공기 압축기 증설시 용량을 정확히 확인하고, 배관을 설치함으로서 관련 장비를 사용하는데 문제없게 진행되어야 한다.

공기압축기 보관룸은 소음 방지를 위해 적정위치를 선정하여 별도 공간을 확보하여 배치하여야 한다.

11) 전기설비

수전반 증설시 필요한 전기용량을 정확히 확인하여 최대 전압이 현장 설비 가동에 부족하지 않도록 유의하여야 한다. 또한, 제주리사이클링센터 공장동 내 전기실의 구조 및 용량등을 사전에 명확히 확인하여 승압공사에 만전을 기해야 한다.

수전반 증설 후, 사무동에 원활한 전기 공급이 계속적으로 이루어져야 하며 사무동 전기 공급에 대해 사무동 공사처와 긴밀히 논의하여 전기공급에 차질이 없도록 하여야 한다.

수전반 증설에 따른 한국전력공사 불입금 및 한국전기안전공사에서 시행하는 안전검사에 해당하는 비용 납부 및 검사를 완료함을 원칙으로 한다.

기존 운영 중인 전기설비의 재사용(Panel, Breaker, 배선 등) 및 수정(PLC)에 최대한 협조하여야 하며 원칙으로 한다.

시공업체는 현재 운영 중인 센터 현장실사를 통해 재사용이 가능한 품목과 방법을 확인하고 설계 및 견적에 반영하여야 한다.

기타 신규 제작 및 설치의 필요성이 인정되는 경우 협의를 통해 설계에 반영할 수 있다.

12) 철거 및 설치(지붕공사 포함)

철거는 공사범위에 해당하는 모든 설비 및 시설물을 포함하나, 기존 파쇄기 및 일부 설비의 재사용을 고려하여 매각 가능성이 있으므로 이를 고려하여 철거를 진행하여야 한다.

재사용 품목은 현장에 다시 사용하는 품목과 별도 포장 후 보관하는 품목으로 구분하며, 발주처와 사전 협의하여 지정한다.

철거물의 보관장소 이전 및 하역에 대한 모든 사항을 포함한다.

설치는 공정 구축에 필요한 모든 사항을 포함한다.

설치되는 모든 설비는 유지보수를 위한 공간을 충분히 확보하여야 한다.

철거 및 설치과정에서 기존의 완성된 구조물을 오염시키거나 훼손하였을 때는 지체 없이 복구하여야 한다.

모든 시설물들은 해당 작업이 끝나면 신속히 불필요한 재료 및 가설물들을 처분 또는 철거하고 깨끗이 청소를 실시한다.

13) 콤프분해 설비 구매

본 설비는 향후 유가물 고품위화를 위한 설비로 구매 대행을 포함하도록 한다.

14) 부대설비

파쇄기 수직 높이에 따라, 공장동 일부 구간에 지붕 높이 확장 공사가 필요할 수 있으므로 이에 대한 일체 내용을 포함한다.

현재 공사지역에 설치되어 있는 CCTV를 적극 재사용하여, CCTV 및 관리 모니터 연동 작업을 실시해야 한다.

파쇄기 주변 방음칸막이(소음룸)에 대한 계획을 수립·시공하여야 한다.

파쇄기 기초 토목공사 및 기초 구조물에 대한 업무는 제외한다.

상기항목(1~13)에 대한 세부적인 구매·설치·시공 계획은 발주처와 협의할 수 있다.

4. 안전관리

시공업체는 공사기간에 발생되거나 발생 예측되는 재해(공해 및 안전사고 등)에 전적인 책임을 지며, 담당자를 두어 방지대책을 사전에 철저하게 수립하여 이를 이행하여야 한다.

시공업체는 공사의 시공에서 항상 세심한 주의를 하여, 모든 사람의 안전을 꾀하고, 사고 발생 시 신속히 공사감독관에게 보고하여야 한다.

공사 중에는 필요한 인원을 배치하여 정리, 정돈 및 안전관리에 노력하여야 한다.

중요한 시설물에 근접한 공사를 할 때는 미리 안전에 필요한 조치, 긴급할 때 응급조치 및 연락방법 등을 공사감독관과 협의하여 작성하고 이를 준수하여야 한다.

화약, 가솔린(Gasoline)등 위험물을 사용하는 경우에는, 관계법령에 따라 취급에 만전을 기할 수 있도록 대책을 강구하여야 한다.

가설물 및 중요물을 취급하는 발판은 견고한 구조로 설치되어야 한다.

공사 현장의 질서유지 및 화재, 도난 등의 사고방지에 필요한 조치를 강구하여야 한다.

5. 종합 시운전

종합 시운전은 전기 및 계장공사의 기자재가 설치 완료되고 시공업체가 단독 시운전을 완료한 상태에서 타 공종의 부하시험시, 기계설비를 개별 운전 또는 연계, 자동운전 등을 실행하여 기계설비의 성능효율 등을 종합적으로 시험하기 위한 시운전을 말하며 시공업체가 자체적으로 성능검사를 실시하여 설비의 이상이 없을 경우 공사감독관에게 종합 시운전 계획을 보고하고, 승인을 득한 후 실시해야 한다.

종합시운전 계획서는 기계설비의 단독운전 완료시기와 타 공종의 부하시험 기간을 검토하여 전체공사 준공일 내에 완료되도록 실시계획을 작성하고 인원, 장비투입 계획 등 세부사항을 포함해야 한다.

종합 시운전은 모든 부대설비의 작동 및 설치상태를 최종적으로 점검, 확인하기 위하여 실시하는 것으로 공사감독관 입회하에 설치된 모든 설비를 설계운전조건으로 연속운전상태에서 실시하여야 하며 시운전 조건 및 시험결과가 만족할 수 있는가를 확인한다.

종합 시운전 소요되는 유틸리티(전력비, 용수요금 등)를 제외한 기타비용(장비사용 공구, 소모성 재료비, 인건비 등)은 이 공사비에 포함돼 있으며 시공업체가 부담한다.

종합 시운전에서 기계공사 설비의 성능확인 및 보증을 해야 하며, 최적 조건의 부하 운전상태에서 시설물 운영 부서에 인계되도록 해야 한다. 이때 최적 조건의 상태가 이루어지지 않아 시운전 기간을 연장한 경우 귀책사유가 계약상대자에게 있을 시에는 계약상대자 부담으로 최적의 운전상태가 될 때까지 시행하여야 한다.

종합 시운전이 완료되면 종합 시운전 결과보고서를 제출한다.

준공도서 제출

· 납품품목 명세서(형식, 규격, 수량, 부속품·예비품·공구류 등 명시)

· 설계계산서(용량계산서, 축동력계산서, 기타 기기에 대한 계산서 등)

· 도면(배치도, 조립도, 배관시공도, 전기배선도, 제어회로도 등)

· 제작·설치 시방서(제작 및 설치를 위한 각종 기준, 재질, 절차, 유의사항 등)

· 기타 명시되지 않은 사항은 일반 준공도서 작성기준에 준하여 제출한다.

6. 인·허가

공장동 및 공장동 내 재활용 설비변경에 따른 인·허가(신고 사항 포함) 조치 사항은 금회 공사의 과업에 포함된다. 특히, 공장동 폐기물처리업 변경 허가 신청(설비 변경) 업무는 제주리사이클링센터의 협조를 받아 추진하여야 한다.

7. 보증사항

시공업체는 본 공사설계기준에 따라 기계설비의 제작, 설치에 대하여 충분한 기술검토를 하여야 하며, 기계설비의 성능에 대해서는 시공업체가 전적인 책임을 진다.

본 공사설계기준의 불합리성으로 성능보장이 어려울 경우 계약상대자는 지체 없이 변경요구를 할 수 있으며, 그 대안을 제시하여야 한다.

본 공사설계기준에 의하여 제작, 납품, 설치되는 물품은 준공일로부터 2년간 책임 보증하여야 한다.

하자 보수에 대한 범위는 설비 운전 용량을 초과하여 가동하지 않았음에도 불구하고, 공정상의 심대한 결함이나 추가적인 가동이 불가한 경우를 말한다. 또한, 핵심부품의 결함으로 인한 설비 고장을 포함한다.

기타 명시되지 않은 사항은 일반 상관례에 준하여 보증하여야 한다.