과업지시서

수도권자원순환센터 TV 재활용 공정 이전·구축 공사 과업지시서 -

2020. 03

한국전자제품자원순환공제조합

1		추진 배경 및 목적

□ 배경 및 목적

가. 배경 및 필요성

ㅇ FPD TV 재활용공정 방식은 공정효율 관련 한계에 따른 개선 필요

ㅇ CRT TV 재활용공정은 입고물량의 점진적 감소추세에 따라, 기존설비 이전·설치 및 지속적 운영 필요

ㅇ 좁은 공간 내 처리 공정에 의한 안전성 문제 등 재활용 현장여건 개선

※ FPD TV : 평판디스플레이 TV(Flat Panel Display, ex: LCD, PDP 등)

※ CRT TV : 음극선관 TV(Cathode-ray tube)

나. 목적

□ 수도권자원순환센터 중·소형 공장동 부지 활용을 위하여, 現 TV(CRT, FPD) 재활용공정을 이전·설치(구축)함으로써 환경/인체 유해물질에 대한 체계적 관리 및 재활용 현장여건 개선

· 냉음극형광램프(Cold Cathode Fluorescent Lamp, CCFL) 및 형광물질 (Fluorescent Materials) 등과 같은 유해물질에 대해 체계적이고 안전하게 포집/회수할 수 있는 여건 마련

다. 현장정보

□ 수도권자원순환센터(MERC) : 경기도 용인시 처인구 이동읍 덕성산단 1로 68번길 19

□ 本 공장동 : 기존 FPD 및 CRT 재활용 공정, 핸드폰 파쇄기 및 부대시설 이전

□ 중소형 공장동 : FPD 및 CRT 재활용 공정, 핸드폰 파쇄기 및 부대시설 설치

그림 1. TV 재활용 공정 이전_구축 공사(안)

2		과업 개요 및 계약조건

1. 용역명 : 수도권자원순환센터 TV 재활용 공정 이전·구축 공사

❍ 목    적 : TV(FPD, CRT) 공정(부대시설 포함) 이전 및 신규 설치

휴대폰 파쇄기 이전 설치(부대시설 포함)

❍ 계약기간 : 2020. 04. ~ 2020. 06. [계약일로부터 약 3개월]

❍ 계약금 지급계획

표 1. 계약금 지급 계획

구 분	선수금(30%)	중도금(40%)	잔 금(30%)
지급시기	계약 체결 후 15일 이내	제작·구매 검수일로부터 15일 이내	시운전 및 공제조합 완료 승인 후 공사완료 로부터 15일 이내

2. 적용 범위

❍ 본 사업은 수도권자원순환센터 내 TV(FPD, CRT) 공정(부대시설 포함) 이전 및 신규 설치, 휴대폰 파쇄기 이전 설치(부대시설 포함) 및 제반 설비를 위한 시스템 구축을 주요 목적으로 한다.

❍ ‘시스템 구축’이라 함은 자동화 공정을 통해 재생산자원을 회수하기 위하여 일반적으로 행해지는 선별, 그리고 이송에 필요한 기계장치의 설치와 연동을 말하며, 모든 부하/무부하 테스트 완료를 포함한다.

❍ 또한, 상기 ‘시스템 구축’을 최종적으로 구현하기 위한 2차 전기공사를 포함한다.

❍ 본 사업은 ‘시스템 구축’에 따른 변경사항으로 인해 발생하는 관련 인허가의 ‘신고’ 또는 ‘허가’ 변경업무를 포함한다. 단, 세부내용은 공제조합과 협의 가능하다.

❍ 본 사업의 설비 공급내역(안)은 공제조합에서 사전 조사에 의해 작성된 내용이며, 이와 다른 형태의 설비를 제안하여도 무방하나, 설비의 설치 및 연동의 목적은 공제조합의 최종 목표와 동일하여야 한다.

3		과업 세부 내용

1. 과업목표

□ CRT TV 재활용 공정 이전 및 신규 설치

□ FPD TV 재활용 공정 이전 및 신규 설치

□ 폐휴대폰 재활용 공정 이전 및 설치

□ 기타 부대시설 설치

2. 과업내용

❍ 설비 내역(안)

기계·장치 및 구조물과 기초공사에 대한 부분을 모두 시공할 수 있어야 한다.

전기 분·배전 시공(2차 전기 및 PLC 공사)이 가능하여야 한다.

설비 내역(안)을 기본으로 제안 내용을 모두 설계 및 시공 가능하여야 한다.

설비 상세 내용은 공제조합 및 수도권자원순환센터와 협의해야 한다.

표 2. 수도권자원순환센터 TV 재활용 공정 이전·구축 공사 세부 내역(안)

분류	설비명	수량	상세내용	비고
CRT TV 재활용공정	반입리프트	1 set	- 5,000 x 4,000 x 925H - 리프트 경사각도는 15도 유지 - CYLINDER: Φ80x650 ST. - HYD' UNIT 3.7Kw x 50L (유압유닛) - CYLINDER BASE : [-150x75] - 리프트 컨트롤러(비상버튼 등) 및 안전 가이드 - LEG: S.Q-100x50(C/V 다리) - 용량 : 3.0ton/h 이상 (CRT 철파레트 1개이상 기준)	신규
	작업대	1set	- 1,500W x 1,500L x 800H - 바닥 철판은 ss41 x 6t로 제작	신규
	Air 배관	1set	3인 이상 사용 - 메인 배관 : 40A - 작업자 배관 : 15A	신규
	기존설비 이전		- 슬라이다스, C/V, 형광체 회수대 등 이설	재사용 보수
	집진기	-	- 덕트 등 신규 설비에 재연결 재사용 집진기 이설, 외부도색 및 기능 재점검 보수	재사용 및 보수
	전기 공사	-	2차 전기 공사	신규
FPD TV 재활용공정	무구동 컨베이어	1set	- 800W x 1,000L x 800H (Shaft Φ17) - LEG: S.Q-100x50(C/V 다리) - ROLLER: Φ60.5 백색아연도금 - 이물받이(작업자 쪽 경사) - FRAME: SS41x4.5t LASER절단 및 절곡 후 분체도장함	신규
	무구동 컨베이어 (작업대 6개 포함)	2set	- C/V :800W x 6,000L x 800H (Shaft Φ17) - LEG: S.Q-100x50 (C/V 다리) - ROLLER: Φ60.5 백색아연도금 - 이물받이(작업자 쪽 경사) - 작업대 : 800W x 1,000L x 6t - FRAME: SS41x4.5t LASER절단 및 절곡 후 분체도장함.	신규
	Air 배관	1set	6인 이상 사용 - 메인 배관 : 40A - 작업자 배관 : 15A	신규
	전기 설비	LED 방폭등, 전열기(복사패널) 제어반	- 복사 히터 6개 이설 및 신규 4개 설치	재사용 ,신규
			- 복사 패널 컨트롤 판넬 제작	신규
			- LED 방폭등 18개 설치	신규
휴대폰 파쇄기	全 공정 (파쇄기, 집진기 등)	-	- 기존 판넬 재사용 - 신규설치 설비 관련 2차 전기공사 일체 - 덕트 등 신규 설비에 재연결	재사용
부대시설	냉방기 설치 및 덕트공사	1 set -	115평 냉방기(에어컨) 덕트(보온제) 시공 작업자 위치 상단 자바라 설치	신규 -
폐기물			발생 폐기물은 자체 처리 자산은 조합에서 처리

❍ 설비 기본 설계(안)

설계(안)은 고정된 공정은 아니며 추가 수정, 개선하여 제안할 수 있다.

설비 상세 내용은 공제조합 및 수도권자원순환센터와 협의해야 한다.

공장동 내 설치(안)을 제안하여야 한다.

설비 제작 前 승인도서에 대한 협의를 해야 한다.

❍ 공사 계획(안)

총 공사기간은 발주일로부터 약 3개월로 하며 기타 사항은 공제조합과 협의

세부 일정은 아래를 참고하여 제안하여야 한다.

표 3. 공사 계획(안)

단계	항목	기간	공사내역	계획안 세부내용
1	설비 구매 및 제작	‘20년 04월~ ‘20년 06월	· 공사 관련 기초 조사 및 협의 · 설계 및 부대시설 구매 및 제작	· 구매 및 제작품 검수 및 테스트 必
2	설치 및 시운전	‘20년 06월	· 이설 및 설치(설비 및 전기 등) · 시운전 · 준공도서 제출	· 설비 및 부대시설 구축 · 시운전 · 현장 설비 성능 테스트 검수 必

2. 설비 일반조건

제작 시 각 공정별로 다음의 사항을 준수하여 제작하고 제작공정 및 방법은 다음과 같다.

가. 설계 및 제작기준은 다음 각 호를 따른다.

한국공급 표준규격(KS)

국제 표준규격

일본공업 표준규격(JIS)

독일공업협회규격(DIN)

그 외 유럽 등 국제적으로 인정하는 설비 규격

나. 문자 및 기호표시

사용언어 : 본 설비에 사용되는 문자는 한글과 아라비아 숫자로 표기함을 원칙으로 하며 전문 기술 용어 등에 대해서는 영문을 병용 사용한다.

Symbol : 설계 및 제작 등에 있어서 사용되는 Symbol은 KSC에 준하며 이를 제외한 특수한 Symbol은 상기 ‘가’의 각 호중 하나를 따른다.

다. 단위

사용언어 : 본 설비의 설계, 제작, 시험, 검사등에 사용하는 단위는 MKS 단위계를 사용하며 전기량에 필요한 단위는 KSC에 준한다.

라. 설계 및 엔지니어링

다음과 같은 도면, 작업사양, 장비 구성 list, 제출서류 등은 공급자가 제공함을 원칙으로 한다.

1) 공급설비를 현장에 설치하기 위한 설계

2) 전기 및 배관공사를 위한 설계

3) 토건 및 Utility 공급 공사를 위한 설계

4) USER가 공급해야 할 자재 및 설비 List와 사양

5) 도면 및 자료

마. 시운전

장비 설치 후 최종 확인 및 시운전은 공급자가 시행한다. 시운전은 공급자의 계획에 따라 USER와 함께 실시한다.

설비 최종 설치 후, 무·부하 테스트 (1~2일)을 USER와 함께 수행하는 것을 기본으로 한다.

바. 교육

공급자는 시운전 후 USER에게 설비에 관한 전반적인 사항에 대해 교육을 실시하며, 교육인원, 기간, 장소 등에 관한 사항은 추후 USER와 협의 후 결정한다.

3. 상세설비 조건(안)

제작 시, 각 설비별로 그 특성과 쓰임이 다르므로 아래 사항을 준수하여 설비를 제작하여야 한다. 단, 이에 준하는 설비들로 상세설비 제작 계획(안) 수립 후, 제출 할 수 있다.

□ CRT TV 재활용 공정

1) 반입 리프트(신규)

철 파레트에 보관 중인 CRT TV를 용이하게 옮길 수 있게 설계되어야 한다.

보관량(3.0ton/h, 철 파레트 1개 이상)에 적합한 속도 및 구조로 설계하여야 한다.

폭은 5,000mm 이상이며, 높이 및 길이는 CRT TV 이송 시 흘러내리거나 미끄러지지 않게 설계를 하여야 한다.(내부 구조, 경사, 안정성 등 고려 必)

최대한 높이는 낮춰서 유지보수 용이성을 고려하되, CRT TV 배출은 원활하게 이송할 수 있도록 설계되어야 한다.

리프트는 상하 조절이 가능하여야 하며, 컨트롤 스위치 또는 조절방안 공제조합 및 수도권자원순환센터와 협의해야 한다.

CRT TV 충격에 강한 구조와 재질을 사용하여야 한다.

2) Air 배관 및 집진기

메인 배관은 40A, 작업자 배관은 15A로 설치해야하며, 작업자는 4명 이상으로 검토하여야 한다.

컴프레셔는 수도권자원순환센터가 보급하며, 이에 설치를 하여야 한다.

집진기는 재사용(이전 설치)하며, 외부도색 및 기능 재점검 보수를 하여야한다.

집진기는 신규 설비에 재연결 하여야 한다.

□ FPD TV 재활용 공정

1) 무구동 롤러 C/V 1set (신규)

폭은 800mm, 길이는 1000mm, 높이는 800mm이여야 하며 샤프트는 ɸ17이여야 한다.

컨베이어 다리는 S.Q-100x50이여야 하며, 롤러는 ɸ 60.5에 백색아연도금을 하여야 한다.

이물받이는 작업자가 있는 쪽으로 경사를 유지해야하며, 정리가 용이해야한다.

FRAME은 SS41x4.5t, Laser절단 및 절곡 후 분체 도장을 하여야 한다.

2) 무구동 롤러 C/V 2set (신규)

폭은 800mm, 길이는 6,000mm, 높이는 800mm이여야 하며 샤프트는 ɸ17이여야 한다.

컨베이어 다리는 S.Q-100x50이여야 하며, 롤러는 ɸ 60.5에 백색아연도금을 하여야 한다.

무구동 롤러 내 작업대 6개가 설치되어야 하며, 폭은 800mm, 길이는 1,000mm, 두께는 6t로 설치하여야 한다.

이물받이는 작업자가 있는 쪽으로 경사를 유지해야하며, 정리가 용이해야한다.

FRAME은 SS41x4.5t, Laser절단 및 절곡 후 분체 도장을 하여야 한다.

3) Air 배관

메인 배관은 40A, 작업자 배관은 15A로 설치해야하며, 작업자는 7명 이상으로 검토하여야 한다.

□ 휴대폰 파쇄기 이전 설치

- 기존 휴대폰 파쇄기 및 부대시설을 일체 이전 설치 하여야한다.

- 기존 전기 판넬 재사용하여야 한다.

- 설비 관련 2차 전기공사를 하여야 한다.

- 덕트 등 이전 설비에 재연결 하여야 한다.

□ 부대시설

- 기존 전열기(복사 패널)을 이전 설치하여야 하며, 4개를 추가로 신규 구입 및 설치하여야 한다.

- 전열기(복사 패널)의 컨트롤 박스를 제작하고 별도 제어할 수 있도록 하여야 한다.

- LED 방폭등을 6개씩 3구역(18개) 설치하여야한다.

- 냉방기(에어컨)은 115평형을 1대 신규 구입과  덕트(보온제) 신규 시공을 하여야 하며, 작업자 위치에 자바라를 신규로 설치 하야여 한다.

- 설비 신규 제작 및 이전 설치 관련 전기 공사를 일체 하여야 한다.

- 全 설비에 대해 필요시 안전 가이드(충돌 방지 등) 등을 설치 하여야 한다.

(‘산업안전보건법 및 산업안전보건법에 관한 규칙’ 의거)

- 신규 설비 및 재사용 설비(덕트 등)들 中 필요한 부분들은 신규 설비에 재연결 하여야 한다.

□ 검수 및 테스트

납품 전 성능 테스트를 기본으로 하며, 공제조합 및 수도권자원순환센터 검수 확인 후 납품하는 것으로 한다.

설치 후 현장 테스트 결과가 요구사항에 충족하지 못할 경우 제안업체는 개선품 또는 대체품을 제공하여, 공사일정에 문제가 없도록 대응하여야 한다.

설치 전·후 설비별 테스트 결과 및 시운전(목표 등) 결과를 공제조합 또는 수도권자원순환센터와 공유하여야 한다.

□ 철거 및 기초 공사

기존 설비(전기 포함) 철거 시 필요한 기간 및 방안을 제안하여야한다.

신규 설비에 필요한 기초 공사(토목, 건축, 전기 등)에 대한 기간 및 방안을 사전에 공유하여야 한다.

□ 인허가

필요한 설비(컨베이어 벨트 등)에 대한 인증 및 안전검사(자율안전확인인증 등)를 획득 및 제출 하여야한다.

공사에 필요한 인허가(대기, 재활용업, 토목, 건축, 전기 등) 발생 시 이를 대행하여야 하며 공제조합 및 수도권자원순환센터와 협의해야 한다.

4. 안전관리

시공업체는 시공에 따라 발생되거나 발생 예측되는 재해(공해 및 안전사고 등)에 전적인 책임을 지며, 담당자를 두어 방지대책을 사전에 수립하여 시행하여야한다.

시공업체는 공사의 시공에서 항상 세심한 주의를 하여, 모든 사람의 안전을 도모하고, 사고 발생 시 신속히 공사감독관에게 보고하여야 한다.

공사 중에는 필요한 인원을 배치하여 정리, 정돈 및 안전관리에 노력하여야 한다.

중요한 시설물에 근접한 공사를 할 때는 미리 안전에 필요한 조치, 긴급할 때 응급조치 및 연락방법 등을 공사감독관과 협의하여 작성하고 이를 준수하여야 한다.

화약, 가솔린(Gasoline)등 위험물을 사용하는 경우에는, 관계법령에 따라 취급에 만전을 기할 수 있도록 대책을 강구하여야 한다.

가설물 및 중요물을 취급하는 발판은 견고한 구조로 설치되어야 한다.

공사 현장의 질서유지 및 화재, 도난 등의 사고방지에 필요한 조치를 강구하여야 한다.

5. 종합 시운전

종합 시운전은 전기 및 계장공사의 기자재가 설치 완료되고 시공업체에 의해 각 단위공정에 대한 단독 시운전을 완료한 상태에서, 모든 단위공정의 전체적 연동성의 원활함을 점검하기 위하여 모든 단위공정을 연속으로 (자동)시운전을 실시하는 것을 말한다.

종합 시운전은 1차적으로 모든 설비의 작동 유/무를 확인하며, 2차적으로 공제조합이 제안한 표준성능을 충족하는지 점검하며, 최종적으로 최대성능을 충족하는지 부하 운전을 실시하여야 한다.

종합 시운전 시기는 시공업체가 자체적으로 성능검사를 실시하여 설비의 이상이 없을 경우, 공사감독관에게 종합 시운전 계획을 보고하고, 공제조합의 승인을 득한 후 실시해야 한다.

종합 시운전 계획서는 기계설비의 단독운전 완료시기와 모든 단위공정의 부하시험 기간을 검토하여 전체공사 준공일 내에 완료되도록 실시계획을 작성하고 계획서에는 인원, 장비투입 계획, 공제조합 협조사항 등이 반드시 포함되어야 한다.

종합 시운전의 완료(성공) 유/무에 대한 사항은 공제조합, 설치현장(수도권자원순환센터), 그리고 시공업체의 협의에 의해 결정되며, 공제조합 또는 설치 단위사업장(수도권자원순환센터)은 추가적인 종합 시운전이 필요한 경우 이에 대한 시운전의 불충분성에 대한 사유를 시공업체에 전달하여야 한다.

종합 시운전 시 소요되는 유틸리티(전력비, 용수요금 등)를 제외한 기타비용(장비사용 공구, 소모성 재료비, 인건비 등)은 총 공사금액에 포함되어 있으며 시공업체 부담을 원칙으로 한다.

종합 시운전에서 기계 설비의 성능확인 및 보증을 해야 하며, 최적 조건의 부하 운전 상태에서 시설물 운영 부서에 인계되도록 해야 한다. 이때 최적 조건의 상태가 이루어지지 않아 시운전 기간을 연장한 경우 귀책사유가 계약상대자에게 있을 시에는 계약상대자 부담으로 최적의 운전상태가 될 때까지 보완하여야 한다.

단, 공제조합과 수도권자원순환센터 협의 하에 시운전(테스트)을 간소화 할 수 있다.

준공도서 제출

· 납품품목 명세서(형식, 규격, 수량, 부속품·예비품·공구류 등 명시)

· 설계 계산서(용량계산서, 축동력계산서, 기타 기기에 대한 계산서 등)

· 도면(배치도, 조립도, 배관시공도, 전기배선도, 제어회로도 등)

· 제작·설치 시방서(제작 및 설치를 위한 각종 기준, 재질, 절차, 유의사항 등)

· 안전검사 확인서(자율안전확인인증 등)

· 기타 명시되지 않은 사항은 일반 준공도서 작성기준에 준하여 제출한다.

6. 인·허가 및 인증

상기 공사를 추진하면서 발생하는 의무적인 인·허가 및 신고 사항에 대해서는 업무를 대행을 기본 원칙으로 한다.

7. 보증사항

본 공사와 관련된 모든 사항은 협의가 필요할 경우 공제조합과 협의하여야 한다.

시공업체는 본 공사설계기준에 따라 기계설비의 제작, 설치에 대하여 충분한 기술검토를 하여야 하며, 기계설비의 성능에 대해서는 시공업체가 전적인 책임을 진다.

본 공사설계기준의 불합리성으로 성능보장이 어려울 경우 계약상대자는 지체 없이 변경요구를 할 수 있으며, 그 대안을 제시하여야 한다.

본 공사설계기준에 의하여 제작, 납품, 설치되는 물품은 준공일로부터 1년간 책임 보증하여야 한다.

하자 보수에 대한 범위는 설비 운전 용량을 초과하여 가동하지 않았음에도 불구하고, 공정상의 심대한 결함이나 추가적인 가동이 불가한 경우를 말한다. 또한, 핵심부품의 결함으로 인한 설비 고장을 포함한다.

기타 명시되지 않은 사항은 일반적인 계약 상관례에 준하여 보증하여야 한다.