수도권자원순환센터 진공단열재(VIP)냉장고 분류/이송 및 재투입설비 시스템 구축공사 과업지시서

2020. 9.

Ⅰ		사업배경 및 목적

1. 환경기술개발사업-국가연구과제 개요

- 수도권자원순환센터는 환경부의 ‘재활용저해제품 순환이용성 개선 기술(실증사업화)’ 국가연구과제(과제명 :「냉장고 VIP( 진공단열재) 순환이용성 확보를 위한 통합 재활용 시스템개발」) 수행 중 <표 1, 2>

· 2020년 5월 21부터 착수하여 12월 31일까지 1차년도(당해) 연구개발을 마무리하고, 2차년도(2021년) 및 3차년도(2022년) 연구과제를 지속 수행 예정

표 1. 재활용저해제품 순환이용성 개선 기술 - 국가연구과제 기본정보

분류	주요내용
사업명	재활용저해제품 순환이용성 개선 기술
추진단계	실증사업화
연구책임자	윤성필	추진방식	개별과제
기술개발단계	응용연구	공모구분	지정공모
총 연구기간	2020. 5. 21 ~ 2022. 12. 31	당해연도연구기간	2020. 5. 21 ~ 12. 31

표 2. 수도권자원순환센터 수행 – 주관/위탁연구과제 기본정보

분류	주요내용
주관과제	냉장고 VIP(진공단열재) 순환이용성 확보를 위한 통합 재활용 시스템개발
주관기관	㈜수도권자원순환센터 (연구책임자 : 윤성필)
위탁과제	냉장고용 진공단열재 재활용 설비 및 제품 개발
위탁기관	㈜에너베스트 (연구책임자 : 장충효)
참여기업	제주리사이클링센터 (연구책임자 : 김성철)

2. 국가연구과제 기술개발 내용

(1) 폐냉장고 내 진공단열재의 자동화 처리기술 개발 및 설비 실증화

- 폐냉장고 내 진공단열재 선별기술 개발 및 설비 실증화

· 특허 1건, 선별공정 처리시간 : 120초/대

- 폐냉장고 진공단열재 절단 및 해체(제거) 기술개발 및 설비 실증화

· 특허 1건, 절단공정 처리시간: 90초/대, 철판 해체(제거) 공정시간: 30초/대

- 상기 공정(선별-절단-해체) 설비 실증화 및 운전평가 : 25대/hr 처리 효율

- 외판으로부터 진공단열재의 분리 및 심재 추출 기술개발 및 설비 실증화

· 특허 1건, 진공단열재 분리 및 추출시간 : 180초/대 (※ 별도 공정)

- 작업환경 기준 충족 : 소음 (90dB), 유리섬유 분진 (5mg/m3), 휘발성유기화합물 포름알데히드 (0.3ppm 이하), 벤젠 (0.5ppm 이하), 톨루엔 (50ppm 이하)

(2) 폐냉장고 진공단열재의 재활용 공정기술 개발

- 글라스울 심재의 재자원화 최적 공정기술 확보

· 심재(글라스울) 성능평가 : 0.003W/mK 이하

- 재자원화 진공단열재 적용 실증화

· 사업화 1건 : 건축자재 등

(3) 냉장고 내 진공단열재 정보제공방법 개발

- 진공단열재 냉장고의 정보 명세서 (단체)표준 제정(1건)

- 진공단열재 냉장고의 식별표시 및 표기방법 (단체)표준 제정(1건)

- 진공단열재 냉장고의 전자정보제공 방법 개발

(4) 기술이전 및 확산

- 자동화 처리 설비기술 이전·확산(기술료)

- 학술대회 발표, 논문발표, 전시회 참가 등

그림 1. 폐냉장고 내 진공단열재 통합 재활용 시스템 개념도

3. 국가연구과제 당해연도(1차년도-2020년) 연구개발 목표

- 핵심목표 및 기술평가방법 : 진공단열재 냉장고 선별시간 & 선별률 <표 3>

· 1차년도 핵심목표는 진공단열재 냉장고의 선별(판별) 기술 확보

→ 선별에 대한 핵심 기술개발은 위탁기관(에너베스트)에서 담당

· 주관기관(수도권자원순환센터) 은 선별기술 확보를 가정한 실증화설비 구축

→ 실증화설비는 MERC 설치를 원칙으로 함

· 위탁기관(에너베스트) 역할은 선별기술 확보 및 선별설비(단위) 제작

표 3. 주관/위탁연구과제 1차년도 연구개발 (정량적)목표

분류	주요내용
	선별시간	선별률
세계최고 수준	없음	없음
국내(성능) 수준	보유 수준 없음	보유 수준 없음
측정산식	대당 검사시간 (Side/Rear/Door)	VIP 유무판단 인식률 (부위별 100회 반복)
평가방법	KTL(기계설비 인증시험) 또는 수요기업 Field test
목표치	120초	95%
성과 가중치	50%	50%

4. 본 사업의 목적

(1) 냉장고 재활용공정 내 진공단열재 분류-이송 및 재투입 실증화설비 구축

- 실증화설비는 주관기관(수도권자원순환센터) 內 공장동 현장 부지를 고려하여 설계, 시공 및 시운전을 완료하는 것을 주요 목적으로 함 <그림 2>

- 실증화설비는 다음의 두 가지 핵심 공정으로 구성

➀ 진공단열재(VIP) 냉장고 선별에 따른, 분류/이송 및 팔레트 적재 공정

➁ 냉장고 외판(진공단열재 포함)이 제거된 냉장고의 재투입(파쇄기 투입) 공정

그림 2. 본 사업의 주요 목적 - 실증화설비 핵심공정(수도권자원순환센터 공장동 도면)

- 실증화설비 공사는 기계설비의 공사 및 전기공사를 포함하며 이와 관련된 부대설비(에어배관, 형광등, 냉/난방 덕트 등) 공사를 포함하여 실시 예정

- 단, 기계설비 및 전기공사는 ‘국가연구과제 연구개발계획 및 연구재료비 집행 계획(안)’에 근거하여 각각 별도로 발주(공개경쟁입찰) 예정

(2) 진공단열재 냉장고 선별공정과의 연동성 확보

- 국가연구과제 연구개발계획서에 따라, 진공단열재 선별기술 개발 및 선별장치 제작·설치는 위탁연구기관(에너베스트)에서 주관하여 실시

· 본 사업은 위탁연구기관이 설치한 ‘선별장치’를 제외한 후단 공정에 해당하는 ‘분류-이송’ 및 ‘냉장고 재투입’ 공정에 대한 제작·설치 공사가 주요 목적

· 즉, 위탁기관이 설치한 선별장치와의 연동성 확보가 매우 중요

- 냉장고 외판(진공단열재 포함)이 제거된 냉장고는 기계적 파쇄를 위해 다시 별도의 컨베이어로 재투입되어야 하므로, 본 사업을 통해 설치된 재투입 컨베이어는 기존의 파쇄기 투입 컨베이어와의 전기(PLC) 연동성 확보가 중요

· 기존 파쇄기 투입 컨베이어와의 충돌을 예방할 수 있는 대안 필요

(3) 전기공사

- 본 사업은 상기 (1), (2)항에 해당하는 기계설비와 전기공사를 분리함으로써 전기-PLC(Programmable Logic Controller)의 안정화 및 철저한 사후관리 시스템을 확보 예정

- 단, 기계설비를 안정적으로 연동시키기 위해서는 기계설비와 전기공사 시공사 간 긴밀한 조율이 필요하므로, 이에 대한 책임 사항을 과업지시서에 명기하여 기계적/전기적 연동성이 저하되지 않도록 사업 추진

(4) 부대설비 개조·보완공사 실시

- 본 사업은 상기 (1), (2)항에 해당하는 진공단열재 냉장고의 선별-분류-이송 및 외판이 분리된 냉장고의 재투입 공정 구축공사로부터 파생되는 부대설비의 개조 및 보완사항에 대한 공사 일체를 수행

· 주요 부대설비(시설) 공사로는 형광등, 집진용 덕트, 냉/난방공급용 덕트, 에어임팩 사용을 위한 에어배관 공사 등이 필요

- 본 사업은 기존 (불필요)시설에 대한 철거를 포함토록 하여 전반적인 공사관리의 효율성을 최대한 증대하도록 제안

· 시공업체는 사업 전 철거품목에 대해서 제출하도록 명기

· 시공업체는 사업 전 재사용품목에 대해서 제출하도록 명기

(5) 기타사항

- 본 사업은 기계설비 및 전기설비 공사의 이원화 (기계/전기)를 통해 각 분야에 전문적으로 공사 수행이 가능한 기관을 선정하고자 함

· 이에 따라, 본 사업은 기계공사 및 전기공사에 대한 기업 간 컨소시엄 구성 후 지원이 가능하며, 계약체결도 발주기관과 기계 및 전기공사에 대한 계약상대자와 각각 체결하는 것을 원칙으로 함

· 계약서와 별도로 공동수급 표준협정서를 작성하여 제출하여야 함

Ⅱ		사업계획(안)

1. 사업개요

가. 사 업 명 : 진공단열재(VIP)냉장고 분류/이송 및 재투입설비 시스템 구축

나. 사업기간 : 2020. 10. 13 ~ 2021. 1. 12 (3개월)

다. 추진방식 : 공개경쟁입찰 (기계설비 및 전기설비 별도 추진)

라. 총 사업예산 : 금 이억삼백삼십이만팔천원정 (\ 203,328,000)

세부 사업예산

표 4. 기계 및 전기설비 공사 사업예산

분류	사업예산(안) [부가세 별도]
기계설비공사 (71.52%)	금 일억사천오백사십일만삼백구십칠원정 (\ 145,410,397)
전기설비공사 (28.48%)	금 오천칠백구십일만칠천육백삼원정 (\ 57,917,603)

2. 추진일정

가. 계획보고 : 2020. 9. 11 (금)

나. 공고기간 : 2020. 9. 15 ~ 9. 29 (2주)

다. 현장설명회 : 2020. 9. 18 (금) (수도권자원순환센터 예정)

※ 필요시 현장설명회를 1회 추가 할 수 있음

라. 제안발표 평가 : 2020. 10. 7 (수), 14시 (공제조합 예정)

마. 협상기관 선정 : 2020. 10. 8 (목) ※ 개별통보

바. 계약협상 : 2020. 10. 8 (화) ~ 10. 13 (수) ※ 계약체결일 : 10. 13 (목)

사. 계약기간 : 2020. 10. 13 (목) ~ 2021. 1. 12 (3개월)

Ⅲ		과업지시(안)

1. 사업장 기본정보 (기계 & 전기공사 공통)

- 수도권자원순환센터 : 경기도 용인시 처인구 이동면 백옥대로 342번길 67

- 수도권자원순환센터은 공제조합 직할로 운영되는 재활용센터로써 폐전기·전자제품(全 제품군) 재활용을 주요 업무로 함

- 냉장고를 포함한 주요 가전제품(세탁기, TV, 에어컨 등)을 재활용하며 냉장고 처리비율이 타 제품보다 높음

· 연간(2019년 기준) 재활용량 : 약 16,022톤

· 연간(2019년 기준) 재활용량 중 냉장고 비율은: 약 57.73% (9,250톤)

- 본 사업은 수도권자원순환센터 공장동 내부의 ‘냉장고 전처리공정’을 대상으로 하며, 아래 그림의 빨간색 테두리에 해당하는 부분임 <그림 3>

그림 3. 수도권자원순환센터 공장동 내부 배치도면

2. 용어 정의 (기계 & 전기공사 공통)

- 냉장고 전처리공정 : 상기의 공장동 내부 배치도면을 참고로, 빨간색 테두리 내부에 해당하는 부분이 전처리공정에 해당하며, 폐냉장고의 반입(리프트), 이송(컨베이어), 냉매회수(냉매회수기 부대설비 포함), 반전기 등 모든 기계설비와 이를 운용하는 데 필요한 전기설비를 포함

- 선별장치(공정) : 본 사업의 ‘배경 및 목적’에 언급된 바와 같이, 국가연구과제의 위탁연구기관에서 개발하는 설비를 지칭함. 천공-편평도 측정방식의 원리를 가진 장치로써 위탁기관이 전처리공정 내 설치 예정

- 진공단열재 냉장고 분류/이송설비 : 본 사업의 핵심내용으로써 위탁연구기관이 개발한 선별장치를 통해 진공단열재가 내장(채택)된 냉장고로 판단된 제품에 대해, 선택적 이송을 통해 별도로 분리하는 설비

- 진공단열재 냉장고 적재설비 : 진공단열재 내장(채택)된 냉장고가 선택적으로 이송된 후 팔레트에 적재되어 보관될 수 있도록 적재하는 설비

- 진공단열재 제거 냉장고 재투입설비 : 진공단열재 내장(채택)된 냉장고가 선별되어 외판(진공단열재 포함)이 절단/해체된 후 파쇄기에 투입되기 위해 기존 전처리공정 이송 컨베이어로 재투입되는 공정

3. 사업 개요 (기계 & 전기공사 각각)

- 사업목적 : 진공단열재(VIP)냉장고 분류/이송 및 재투입설비 시스템 구축

- 사업기간 : 2020. 10. 8 ~ 2021. 1. 7 (3개월)

- 공사기간 : 10일이내 (냉장고 재활용공정 운영중단 기간)

- 총 배정예산 : 금 이억삼백삼십이만팔천원정 (\ 203,328,000)

- 공사 세부 배정예산

· 기계공사 : 금 일억사천오백사십일만삼백구십칠원정 (\ 145,410,397)

· 전기공사 : 금 오천칠백구십일만칠천육백삼원정     (\  57,917,603)

- 계약금 지급계획 (각 공사件) <표 5>

표 5. 계약금 지급계획 (국가연구과제 연구비를 이용하여 집행 예정)

구 분	선급금(30%)	중도금(40%)	잔 금(30%)
지급시기	계약 체결 후 15일 이내	제작·구매 최종(중간) 검수일로부터 15일 이내	시운전 및 발주처의 완료 승인일로부터 15일 이내

4. 적용 범위 (기계 & 전기공사 공통)

- 본 사업은 수도권자원순환센터 내 냉장고 재활용 전처리 공정에서의 ‘진공단열재 냉장고 분류/이송’ 및 ‘진공단열재 제거 냉장고 재투입’에 대한 기계 및 전기공사를 통한 재활용 실증화 시스템 구축을 주요 목적으로 함

- 본 사업(실증화 설비 구축공사)에 대한 정의 및 범위는 ‘용어 정의’ 기준을 따르며, 세부 공사 범위는 이하의 과업지시서 내용을 준용함

- ‘실증화 시스템 구축’에 수반되는 모든 공사 항목에 대해 기계와 전기공사를 분리함으로써 계약 및 공사관리 체계를 이원화함. 단, 본 과업지시서에 명시된 협업 및 이행사항을 반드시 이행해야 함을 원칙으로 함

- 본 사업(공사)은 설비변경 사항으로 인해 발생하는 관련 인허가의 ‘신고’ 또는 ‘허가’ 변경업무를 포함함. 단, 세부내용은 발주기관과 협의 가능함.

- 본 사업의 실증화 계획(안)의 상세명세(안)는 발주기관(연구기관)에서 사전 조사를 통해 작성된 내용으로써 이와 다른 형태의 설비를 제안하여도 무방하나, 설비의 설치 및 연동의 목적은 발주기관의 최종 연구목표와 동일하여야 함

5. 사업의 특수성

- 본 사업은 수도권자원순환센터가 수행중인 국가연구과제(과제명 :「냉장고 VIP(진공단열재) 순환이용성 확보를 위한 통합 재활용 시스템개발」)의 연구비를 이용하여 수행하는 사업임

- 이에 따라, 계약상대자(수행기관)는 ‘환경기술개발사업 운영규정 및 관련 지침’에 근거하여 본 사업 수행과정에서 발생한 지출에 대한 증빙서류 일체를 발주기관의 요청에 따라 제출하여야 함

- 본 사업에 대한 계약은 발주기관(수도권자원순환센터)과 계약상대자(수행기관)가 체결함을 원칙으로 하되, 계약금의 집행, 지급근거, 지급방법, 성과물 제출, 지출증빙 등에 대한 세부사항은 ‘환경기술개발사업 운영규정 및 관련 지침’에 근거하여 발주기관이 계약상대자에게 안내할 수 있음

- 계약금 지급계획에 근거하여 선급금(30%), 중도금(40%), 잔금(30%)를 지급함을 원칙으로 하되, 국가연구과제의 연구개발비의 집행여건에 따라 지급 시기 또는 방법이 부득이하게 변경될 수 있음

- 본 사업은 기계공사 및 전기공사로 나누어 공개경쟁입찰을 통해 계약상대자를 선정함을 원칙으로 하며 각 공사의 배정예산은 당해연도 연구비를 고려하여 발주기관이 사전 조사한 자료에 근거하여 산출되었음

- 기계공사 및 전기공사 계약상대자(수행기관)는 본 사업의 원활한 수행과 성공적인 성과도출을 위하여 발주기관이 제시하는 협약서 및 비밀유지각서 작성을 원칙으로 하며, 신의성실의 자세로 업무협조에 적극적으로 임해야 함

- 본 사업은 기계 및 전기시설의 설치/연동/시운전 완료가 가장 중요한 목표이므로, 각 계약상대자가 목적 달성에 저해하는 행위 또는 비협조적인 태도를 견지할 경우, 발주기간은 계약상대자에게 계약 취소 및 손해배상을 청구 할 수 있음

6. 세부내용 (기계 & 전기공사 공통)

(1) 진공단열재 냉장고 분류/이송 및 재투입설비 시스템 개요

- 본 연구개발사업은 총 3년간(2020~2022년) 진행되며, 최종적으로는 진공단열재를 냉장고로부터 분리하여, 심재(글라스울)를 재활용함으로써 진공단열재 재자원제품(건축용 단열재 등)을 생산품 제작을 목표로 함 <그림 4>

- 1차년도(2020년)에는 아래 1~3단계에 해당하는 세부목표 달성을 목표로하며, 이에 해당하는 기계 및 전기장치 제작·설치 및 시운전을 목표로 함

- 주요공사 항목(List)  (※ 레이아웃, 상세도면, 제작, 설치, 시운전 포함)

· [기계#1] 진공단열재 냉장고 분류/이송설비 레이아웃 설계 1식

· [기계#2] 진공단열재 냉장고 적재설비 1식

· [기계#3] 진공단열재 제거 냉장고 재투입설비 1식

· [전기] 상기 기계#1~3에 해당하는 각각의 전기공사 일체 1식

· [부대설비] 형광등, 집진덕트, 냉/난방덕트, 철거, 인허가 등 각 1식

그림 4. 연구개발 전체 목표 및 1차년도(2020년) 세부 추진항목 (빨간색 음영)

그림 5. 연구개발 전체 목표 및 1차년도(2020년) 주요공사항목 설치 위치도 (빨간색 음영)

- 선별장치는 위탁연구기관에서 개발 중이므로, 본 사업에서는 선별장치의 개발은 과업에서 제외됨. 다만, 선별장치가 수도권자원순환센터에 원만하게 설치될 수 있도록 계약상대자는 위탁연구기관과의 충분한 사전 협의를 통해 상호 간 업무에 협조하여야 함

※ 위 사항에 대한 책임소재 문제가 발생 할 경우 발주기관의 중재에 따라야 함

- 1차년도(2020년)에 해당하는 주요 공사 항목은 진공단열재 선별 및 재투입에 관련된 공사 항목이므로, 위 그림과 같이 냉장고 재활용공정 중 전처리 컨베이어 부분에서 주요 공사가 이루어질 예정임 <그림 5>

(2) 진공단열재 냉장고 선별에 따른 분류/이송설비

- 기계설비 공사 중 핵심이 되는 부분으로, 위탁연구기관에서 개발한 선별시스템을 기반으로 진공단열재가 내장(채택)된 냉장고로 판별된 경우, 해당 냉장고를 별도로 분류/이송하기 위한 설비

- 흡착방식 또는 이와 유사한 기술을 이용하여 진공단열재가 내장된 냉장고를 정확히 집어서(Catch & Tilting) 기존 위치(파쇄기 투입 컨베이어)에서 별도의 팔레트 위로 이송/적재할 수 있는 기술 및 실증화 구현

- 팔레트 1대당 총 4대의 냉장고를 적재할 수 있도록 설계함을 원칙으로 하되, 다양한 관련 기술을 응용/적용하여 지그재그 방식으로 냉장고 4대를 안정적으로 적재할 수 있는 자동화 기술개발 필요 <그림 6>

- 냉장고 선별에 따른 분류/이송설비 및 이를 작동하기 위한 전기공사 일체 (제어판넬 및 프로그램(PLC 포함, 설치 등)를 설계·시공

그림 6. 진공단열재 내장(채택) 냉장고 선별에 따른 별도 분류/이송 공정에 대한 컨셉(안)

(3) 분류/이송설비 냉장고의 적재

- 진공단열재 내장(채택) 냉장고가 이제기를 통해 분류/이송되어 팔레트에 적재된 후, 해당 팔레트를 자동으로 이동시킬 수 있는 레일(Rail)방식의 팔레트 이송설비 설치

· 레일 컨베이어는 냉장고가 적재된 팔레트를 충분히 움직일 수 있도록 하중을 견디도록 설계되어야 하며, 왕복 운동이 가능하도록 설계

- 지게차 등을 이용하여 작업자가 인위적으로 공(empty)팔레트를 다시 분류/이송 위치에 놓아둠으로써 연속적으로 진공단열재 내장(채택) 냉장고를 팔레트에 적재할 수 있도록 운영

- 진공단열재 내장(채택) 냉장고가 적재된 팔레트의 이송이 가능한 레일 컨베이어 및 이를 작동하기 위한 전기공사 일체 (제어판넬 및 프로그램(PLC 포함, 설치 등)를 설계·시공

· 단, 분류/이송 설비와 적재설비의 전기 판넬을 단일로 구성할 수 있는 경우 별도의 판넬을 제작하지 않아도 무방함

(4) 진공단열재 제거 냉장고 재투입 설비

- 2-3차년도 연구개발 목표인 냉장고 진공단열재의 절단 및 해체장치가 수도권자원순환센터에 설치되었음을 가정하고, 외판(철판)이 분리된 냉장고 본체를 파쇄기에 투입하기 위한 재투입 설비에 대한 설계·시공

- 냉장고 외판이 제거되었으므로 흡착 방식으로 본체를 이동시키기 어려우므로 집기(Catch & Tilting) 기술에 대한 다양한 응용기술의 응용·적용 필요 <그림 7>

- 외판이 제거된 냉장고가 재투입 된 경우, 기존의 컨베이어에서 진행한 냉장고와의 투입 시퀀스(Sequence) 조정을 통한 컨베이어 작동의 유기성 확보

그림 7. 외판이 분리된 냉장고 본체의 재투입(파쇄공정) 공정에 대한 컨셉(안)

7. 공정 기본컨셉(안) 제안

(1) 진공단열재 냉장고 분류/이송 및 적재 시스템 개요

- 진공단열재 냉장고의 선별에 따른 분류/이송 및 적재에 해당하는 부분은 기존의 이송 컨베이어를 기준으로 도면의 상측에 해당

- 설비에 대한 주요 특징은 다음과 같음 <그림 8>

· 규격화된 구조물(structure) 내에서 이송장치(이제기; payload)가 자유롭게 상/하, 좌/우로 운동이 가능

· 이송장치는 냉장고를 팔레트에 지그재그 방식으로 적재하기 위해 헤드(head) 부분이 최소 90도 이상 회전이 가능하도록 설계

· 흡착 또는 집기(catch & tilting) 방식의 이제기(payload)의 왕복 운동(이송 컨베이어 ↔ 팔레트적재) 시간은 약 30초 이내(최대 35초 이내)로 설계

※ 現 수도권자원순환센터 파쇄기 투입 이송컨베이어 정지시간을 기준으로 함 (약 35초)

※ 계약상대자는 착공 전, 각 단위공정별 시간 실측을 통해 사업계획(안)을 작성해야 함

· 냉장고의 운반은 좌식(sedentary form) 방식으로 운반함을 원칙으로 설계

그림 8. 외판이 분리된 냉장고 본체의 재투입(파쇄공정) 공정에 대한 컨셉(안)

(2) 진공단열재 제거냉장고 재투입 시스템 개요

- 냉장고 외판(진공단열재 포함)이 제거된 냉장고의 재투입에 해당하는 부분은 기존의 이송 컨베이어를 기준으로 도면의 하측에 해당

- 설비에 대한 주요 특징은 다음과 같음 <그림 9>

· 규격화된 구조물(structure) 내에서 이송장치(이제기; payload)가 자유롭게 상/하, 좌/우로 운동이 가능

※ 단, 냉장고 외판이 제거되어 있으므로 외판(공기 압축) 흡착 방식의 이제기(payload)는 사용할 수 없고, 집기(catch & tilting) 방식이 고려되어야 함

※ 또는 이와 동등하거나 우수한 냉장고 이송(이제기) 설비가 사용되어도 무방함

· 이송장치의 주 역할은 팔레트 위의 냉장고를 파쇄기 이송용 컨베이어로 옮기는 것

· 파쇄기 이송용 컨베이어로 옮겨진 냉장고는 파쇄기 투입 컨베이어로 방향으로 진행함

· 본 사업을 통해 설치된 파쇄기 투입 컨베이어는 기존의 일반냉장고(진공단열재 비채택) 투입 컨베이어와 전기적 신호/프로그램 수정을 통해 순서적으로 파쇄기에 투입되도록 설계

※ 외판이 분리된 냉장고가 재투입 시스템을 통해 원만하게 파쇄기에 투입될 수 있도록 최적의 기계설비 및 전기공사 방안을 제시

(3) 부대시설

- [형광등] 본 사업을 통해 수도권자원순환센터에 설치되는 기계/전기설비 위치(구역)에 해당하는 상부 형광등에 대한 신규 및 이전·설치

· 형광등은 현장 근로자가 작업상에 불편함이 없도록 설치 되어야하며, 실제 위치는 현장 근로 총 책임자와 협의하여야 함

· 형광등은 신규 설치를 원칙으로 하며, 발생하는 폐기물에 대해서는 계약상대자가 처리함을 원칙으로 함

· 형광등 설치에 대한 세부적인 계획

- [에어배관] 본 사업을 통해 수도권자원순환센터에 설치되는 기계/전기설비 위치(구역)에서 컨베이어 및 해체·분해 작업대에 작업용 에어(에어임팩 등)가 공급될 수 있도록 에어배관 신규 설치 또는 구조 변경

· 에어배관은 현장 근로자가 기존의 폐전기·전자제품을 재활용하는 작업상에 불편함이 발생하지 않도록 원활한 공급 라인을 확보해야 하며, 배관의 실제 위치 또는 변경사항은 현장근로 총 책임자와 협의하여야 함

· 형광등은 신규 설치를 원칙으로 하며, 발생하는 폐기물에 대해서는 계약상대자가 처리함을 원칙으로 함

- [집진덕트] 본 사업을 통해 수도권자원순환센터에 설치되는 기계/전기설비 위치(구역)에 해당하는 상부 집진 덕트 대한 신규 및 이전·설치

· 본 사업에 따른 변동된 기계장치의 목록을 정리하여, 적정(필요) 집진용량을 산출하고 이에 적합한 규격의 덕트를 설치

· 집진덕트의 현장 설치 위치는 근로자가 작업상에 불편함이 없도록 설치되어야 하며, 실제 위치는 현장 근로 총 책임자와 협의하여야 함

· 집진덕트는 신규 설치를 원칙으로 하며, 발생하는 폐기물에 대해서는 계약상대자가 처리함을 원칙으로 함

- [냉/난방덕트] 본 사업을 통해 수도권자원순환센터에 설치되는 기계/전기설비로 인해 변경된 근로자의 작업 위치(구역)에 냉/난방 공급용 덕트 설치

· 변경된 근로자의 작업 위치를 고려하여 냉/난방덕트를 설치함을 원칙으로 하되, 적정 규격의 냉/난방용 덕트 설치

· 냉/난방덕트의 현장 설치 위치는 근로자가 작업상에 불편함이 없도록 설치되어야 하며, 실제 위치는 현장 근로 총 책임자와 협의하여야 함

· 냉/난방덕트는 신규 설치를 원칙으로 하며, 발생하는 폐기물에 대해서는 계약상대자가 처리함을 원칙으로 함

그림 9. 실증화설비 계획(안)을 반영한 수도권자원순환센터 레이아웃 설계(안) 예시

(2020년 실증화공사 대상 : 1, 2번항목)

(4) 기타사항 (하자/보수)

- 본 공사의 하자보수 기간은 1년이며, 하자/보수에 대한 원칙적 책임 각 공사(기계/전기) 계약당사자에게 있음

- 다만, 하자 발생 건에 대한 범위가 명료하지 못한 경우, 공동수급체 대표자는 본 계약의 대표자로써 하자/보수에 대한 책임이 있음

8. 공정 기본컨셉에 따른 주요설비(안) 제안

(1) 기계설비 공사

- 모든 설비는 신규 제작·설치를 원칙으로 하되, 필요시 기존 부품 재사용 가능

- 단, 부품 재사용시 발주처와 반드시 사전 협의를 거쳐야 함

(1)-1. 진공단열재 냉장고 선별에 따른 분류/이송 및 적재 기계설비 공사

표 6. 진공단열재 냉장고 선별에 따른 분류/이송 및 적재 기계설비 공사

분류	세부 분류	품명 및 용도	규격
(1)-1	(1)-1-1	VIP 냉장고 선별 및 일반냉장고 대기콘베이어 1	1100W*2130L*1400H
	(1)-1-2	VIP 냉장고 선별 및 일반냉장고 대기콘베이어 2	1100W*2350L*1400H
	(1)-1-3	VIP 냉장고 선별 이제기(payload)	2600W*5270L*3900H
	(1)-1-4	파렛트 이송 체인콘베이어	1790W*6100L*900H
	(1)-1-5	철 구조물(Structure 포함)	-
포함사항		레이아웃 설계, 상세도면, 제작, 설치, 시운전 포함

(1)-2. 진공단열재 제거 냉장고 재투입 기계설비 공사

표 7. 진공단열재 제거 냉장고의 파쇄를 위한 재투입 기계설비 공사

분류	세부 분류	품명 및 용도	규격
(1)-2	(1)-2-1	VIP 제거 냉장고 투입 이제기(payload)	2600W*5270L*3900H
	(1)-2-2	VIP 제거 냉장고 이송 컨베이어	1100W*2416L*1440H
	(1)-2-3	VIP 제거냉장고 투입콘베이어	1100W*2110L*1440H
	(1)-2-4	냉장고 이송량 조정콘베이어	1100W*2188L*1400H
	(1)-2-5	철 구조물(Structure 포함)	-
포함사항		레이아웃 설계, 상세도면, 제작, 설치, 시운전 포함

(2) 전기설비 공사

- 전기공사는 판넬제작, PLC/프로그램, 설치 및 시운전을 기본 구성으로 함

- 판넬 및 PLC/프로그램에 대한 모든 상세도면/제작도/결선도 등에 대한 정보를 발주처에 제공하여야 함

- 단, 전기공사 관련 과업의 세부범위는 발주처와 사전에 협의하여야 함

(2)-1. 진공단열재 냉장고 선별에 따른 분류/이송 및 적재 전기설비 공사

표 8. 진공단열재 냉장고 선별에 따른 분류/이송 및 적재 전기설비 공사

분류	세부 분류	품명 및 용도	규격
(2)-1	(2)-1-1	VIP 냉장고 선별, 배출 전기판넬	1500W*2200H*600D STEEL*1.6t
	(2)-1-2	PLC 및 SERVO 프로그램
	(2)-1-3	VIP 냉장고 선별, 배출 전기판넬 1차 전기설치공사	-
포함사항		레이아웃 설계, 상세도면, 제작, 설치, 시운전 포함

(2)-2. 진공단열재 제거 냉장고 재투입 전기설비 공사

표 9. 진공단열재 제거 냉장고의 파쇄를 위한 재투입 전기설비 공사

분류	세부 분류	품명 및 용도	규격
(2)-2	(1)-2-1	VIP 제거냉장고 투입 전기판넬	1500W*2200H*600D STEEL*1.6t
	(1)-2-2	PLC 및 SERVO 프로그램
	(1)-2-3	VIP 제거냉장고 투입 전기판넬 1차 전기설치공사	-
포함사항		레이아웃 설계, 상세도면, 제작, 설치, 시운전 포함

(3) 부대설비 공사

- 부대설비 공사의 범위는 형광등, 에어배관, 작업대 발판(구조물), 집진덕트 및 냉/난방덕트 신규 제작·설치를 원칙으로 함

- 본 사업 과정에서 파생적으로 발생하는 일부 부대설비의 위치/구조 변경을 포함하며, 세부적인 사항은 발주처와 협의하여 부대설비 공사의 범위를 설정할 수 있음

(3)-1. 부대설비

표 10. 부대설비 공사

분류	세부 분류	품명 및 용도	규격
(3)-1	(3)-1-1	형광등, 복사판넬 설치 (전기공사)	공사규모에 따라 변동 (협의가능)
	(3)-1-2	에어배관
	(3)-1-3	작업대 발판(구조물)
	(3)-1-4	집진덕드
	(3)-1-5	냉/난방(공조) 덕트 설치
	(3)-1-6	기존/신규 발생 폐기물 처리 및 관련 인·허가

9. 기타사항

- 상기 ‘8’항에 제시한 기계설비, 전기설비, 그리고 부대설비에 대한 주요설비(안)은 발주기관에서 사전에 조사한 자료를 토대로 제공되었으므로 실제 입찰 제안기관에서 제시하는 내용은 위 내용과 상이할 수 있음

- 즉, 본 과업지시서에서 제시하는 사업에 대한 목적성과 부합되는 경우라면, 공사 기본컨셉 및 세부 설비 사양이 변동될 수 있음

- 본 사업이 추구하는 정확한 목적성을 이해하기 위하여, 입찰제안자는 공고 기간 중 ‘현장설명회’에 참석하여 관련한 질의/응답을 실시할 수 있음

- 발주기관은 ‘현장설명회’ 참석 사업자를 대상으로 관련자료(사전 조사자료)를 배포 할 수 있음

10. 공정 기본컨셉에 따른 공사 세부항목(안)

(1) 세부항목(안)

표 11. 발주기관의 사전조사에 따른 공사항목(안)

분류	설비명		수량
기계설비	(1)-1-1	VIP 냉장고 선별 및 일반냉장고 대기콘베이어 1	1식
	(1)-1-2	VIP 냉장고 선별 및 일반냉장고 대기콘베이어 2	1식
	(1)-1-3	VIP 냉장고 선별 이제기(payload)	1식
	(1)-1-4	파렛트 이송 체인콘베이어	1식
	(1)-1-5	철 구조물(Structure 포함)	1식
	(1)-2-1	VIP 제거 냉장고 투입 이제기(payload)	1식
	(1)-2-2	VIP 제거 냉장고 이송 컨베이어	1식
	(1)-2-3	VIP 제거냉장고 투입콘베이어	1식
	(1)-2-4	냉장고 이송량 조정콘베이어	1식
	(1)-2-5	철 구조물(Structure 포함)	1식
	기계공사	중장비 대여비 (인건비 포함)	-
기계부대설비	(3)-1-2	에어배관	1식
	(3)-1-3	작업대 발판(구조물)	1식
	(3)-1-4	집진덕드	1식
	(3)-1-5	냉/난방(공조) 덕트 설치	1식
	(3)-1-6	기존/신규 발생 폐기물 처리 및 관련 인·허가	1식
	기계공사	간접비 (산재보험료, 고용보험료 등)	-
기계설비 공사 소계
전기공사	(2)-1-1	VIP 냉장고 선별, 배출 전기판넬	1식
	(2)-1-2	PLC 및 SERVO 프로그램	1식
	(2)-1-3	VIP 냉장고 선별, 배출 전기판넬 1차 전기설치공사	1식
	(2)-2-1	VIP 제거냉장고 투입 전기판넬	1식
	(2)-2-2	PLC 및 SERVO 프로그램	1식
	(2)-2-3	VIP 제거냉장고 투입 전기판넬 1차 전기설치공사	1식
	전기공사	시운전 가동비 (인건비 포함)	-
전기/부대 설비	(3)-1-1	형광등, 복사판넬 설치 (전기공사)	1식
	전기공사	간접비 (산재보험료, 고용보험료 등)
전기설비 공사 소계
합계