수도권자원순환센터 냉장고 진공단열재 절단 및 해체·제거시스템 실증설비 구축공사

<과업지시서 / 재공고用>

2021. 12.

Ⅰ		사업배경

1. 환경기술개발사업-국가연구과제 개요

- 수도권자원순환센터는 환경부의 ‘재활용저해제품 순환이용성 개선 기술(실증사업화)’ 국가연구과제(과제명 :「냉장고 VIP( 진공단열재) 순환이용성 확보를 위한 통합 재활용 시스템개발」) 수행 중 <표 1, 2>

· 2021년 1월 1부터 2차년도 연구개발에 착수하여 12월 31일까지 2차년도(당해) 연구개발을 마무리하고, 3차년도(2022년) 연구과제를 지속 수행 예정

표 1. 재활용저해제품 순환이용성 개선 기술 - 국가연구과제 기본정보 (1-3차년도 동일)

분류	주요내용
사업명	재활용저해제품 순환이용성 개선 기술
추진단계	실증사업화
연구책임자	윤성필	추진방식	개별과제
기술개발단계	응용연구	공모구분	지정공모
총 연구기간	2020. 5. 21 ~ 2022. 12. 31	당해연도연구기간	2021. 1. 1 ~ 12. 31 ( 2차년도 )

표 2. 수도권자원순환센터 수행 – 주관/위탁연구과제 기본정보 (1-3차년도 동일)

분류	주요내용
주관과제	냉장고 VIP(진공단열재) 순환이용성 확보를 위한 통합 재활용 시스템개발
주관기관	㈜수도권자원순환센터 (연구책임자 : 윤성필)
위탁과제	냉장고용 진공단열재 재활용 설비 및 제품 개발
위탁기관	㈜에너베스트 (연구책임자 : 장충효)
참여기업	제주리사이클링센터 (연구책임자 : 김성철)

Ⅱ		사업목적

1. 사업목적

(1) 냉장고 재활용공정 내 진공단열재 냉장고 외판 절단설비 설치 및 검증

- 본 국가연구과제의 위탁기관 (㈜에너베스트)에서 개발한 진공단열재 적용 냉장고 절단설비 및 해체(제거)설비의 수도권자원순환센터 실증화를 위한 현장 설치공사 및 운전 검증

- 1차년도에 설치된 진공단열재 선별장치(기계 및 전기)와 금회 설치 예정인 이송-절단A-절단B-해체(제거) 장치와의 연동화를 통한 공정시간 손실 및 지연(Time-lack) 최소화

(2) 연구개발 기술적성과(목표시간) 달성을 위한 실증화설비 구현

- Field Test 결과를 바탕으로 기술적성과 목표 달성이 가능하도록 현장 실증화 구현

[절단공정]

· 냉장고 외판 절단 공정은 당초 목표(90초/대) 구현 가능

· 다만, takt-time 개념을 적용하여 절단A와 B 공정은 별도 시간으로 측정

· 실제 Field Test 측정결과 냉장고 대당 90~100초 소요 예상

· 칼날 회전수, 칼날 이동속도를 증가시켜 기술적성과 목표치에 부합되도록 설비 설치 및 연동성 확보

[해체(제거)공정]

· 냉장고 외판 해체(제거) 공정은 당초 목표(30초/대) 구현 어려움

· 실제 Field Test 측정결과, 냉장고 대당 순수 해체(제거) 90초/대 소요

· 다만, 단위공정에서는 실제 공정시간(90초/대)이 목표치(30초/대)를 초과하나, 최종 기술적성과 목표(냉장고 25대/hr 처리) 달성 가능 예상

· 최종 목표(냉장고 25대/hr 처리) 달성이 가능하도록 설비 설치 및 연동성 확보 및 향후 추가 A/S(유지·보수) 추진

[분리공정]

· 냉장고 외판과 진공단열재 심재의 분리공정은 당초 목표(180초/대) 구현 가능

· 실제 Field Test 측정결과, 냉장고 1면당 순수 분리에 60초/대 이내 소요

· 실제 Field Test 측정결과를 토대로, 냉장고 대당 180초(3면 기준) 소요 예상

· 현재 위탁기관에서 검토·제작중인 최적 기술(열풍건조 및 핫프레스) 및 실증화설비를 안정적으로 설치·운용할 수 있도록 협업 수행

2. 기대효과

(1) 절단 및 해체(제거)설비 설치 및 운용 검증

- 진공단열재 적용 냉장고의 절단 및 해체(제거)설비(시스템) 실증화 구현

- 진공단열재 절단 및 해체·제거(시스템) 실증화 구현

- (위탁연구기관 제작 중) 진공단열재 심재 분리(시스템) 실증화 구현

(2) 위탁연구기관 개발기술 및 실증화 시스템 안정화 지원

- 위탁연구기관에서 개발한 절단, 해체(제거), 그리고 분리공정에 대한 현장(수도권자원순환센터) 설치 및 안정화 지원

- 全공정 25대/hr 처리목표 달성을 위한 각 단위공정 개조/보완 지원

Ⅲ		과업지시서(안)

1. 사업개요

가. 사 업 명 : 수도권자원순환센터 냉장고 진공단열재 절단 및 해체·제거시스템 실증설비 구축공사

나. 사업기간 : 2021. 12. 3 ~ 12. 31 (29일) 예정

다. 추진방식 : 공개경쟁입찰(긴급)

라. 추진사유 (긴급입찰)

- 본 국가연구과제에서 위탁연구기관이 개발한 ‘선별장치’의 안정적인 설치 및 운용을 위해, 위탁연구기관과 협업 가능한 수행사업자를 선정

- 본 국가연구과제에서 당해연도(2차년도; 2021년) 협약 기간(~12.31) 내 연구성과물을 실증화하기 위하여 최대한 일정 확보가 필요

마. 추진근거

- 공제조합 계약사무처리규정 제 9조 ➁

· 입찰공고는 입찰일의 전일부터 기산하여 7일 이전에 행하여야 한다. 다만, 긴급을 요하는 사항이거나 재입찰의 경우에는 3일까지 단축할 수 있다.

바. 배정예산 : 금 칠천오백만원정 (\ 75,000,000)

※ 국가연구과제 재료비 활용 예정

표 3. 계약금 지급계획 (국가연구과제 연구비 집행)

구 분	선급금(50%)	중도금(50%)
지급시기	계약 체결 후 15일 이내	제작·설치 최종 검수일로부터 15일 이내

2. 추진일정

가. 최초 계획보고 : 2021. 11. 25 (목)

나. 재입찰공고 : 2021. 11. 29 (월) ~ 12. 1 (수) [긴급]

※ 본회 입찰공고는 재공고로써 유찰 시(단일기관 제안/응찰 또는 미응찰), 사업 제안기관과 협상을 통해 수의계약 체결 가능

다. 평가회의 : 2021. 12. 2(목), 14시 예정 [※별도 안내 예정]

※ 평가회의는 서면으로 진행 예정

※ 평가회의 일정은 발주기관 내부 사정에 의해 변동될 수 있음

라. 계약기간 : 2021. 12. 3(금) ~ 2021. 12. 31(금) (29일간)

Ⅲ		과업지시서

1. 사업개요

가. 사 업 명 : 수도권자원순환센터 냉장고 진공단열재 절단 및 해체·제거시스템 실증설비 구축공사

나. 재입찰공고 : 2021. 11. 29 (월) ~ 12. 1 (수) [긴급/재공고]

※ 본회 입찰공고는 재공고로써 유찰 시(단일기관 제안/응찰 또는 미응찰), 사업 제안기관과 협상을 통해 수의계약 체결 가능

다. 평가회의 : 2021. 12. 2(목), 14시 예정 [※별도 안내 예정]

※ 평가회의는 서면으로 진행 예정

※ 평가회의 일정은 발주기관 내부 사정에 의해 변동될 수 있음

라. 사업기간 : 2021. 12. 3 ~ 2021. 12. 31 (29일간)

마. 추진방식 : 공개경쟁입찰 (긴급)

바. 배정예산 : 금 칠천오백만원정 (\ 75,000,000), 부가세별도

※ 국가연구과제비 사용 예정

2. 절단 및 해체·제거설비 레이아웃 구현

- 수도권자원순환센터 진공단열재 냉장고 처리 전용 공간 內 (2020년 기초 레이아웃 공사 수행구역) 설치 원칙

- 냉장고 외판 절단공정 냉장고 가로축(A), 세로축(B) 2개 구역 설치공사

· 절단A공정 : 기존 컨베이어에 절단설비 설치

· 절단B공정 : 신규 제작 컨베이어에 절단설비 설치

(컨베이어를 제외한 절단설비 일체)

- 냉장고 외판 해체·제거 공정 1개 구역 설치공사 (회전클램프 제외)

· 회전클램프 연동 외판 해체설비 설치

· 철판 및 진공단열재 이송 및 탈거 transfer system 설치

그림 1. 절단 및 해체·제거장치 위치 (레이아웃)

3. 공사 세부내용

(1) 냉장고 가로축 절단설비 설치공사 (절단A 공정)

- 기 설치된 컨베이어(제작업체: 이지산기) 연동성 확보를 바탕으로, 냉장고 3면 (양측면 및 후면) 가로축 절단설비 설치공사

- 절단설비 Header(모듈) 4 Set (모터, 절단Cutter, Servo 등 위탁연구기관 공급) 및 고정용 프레임 (3,780mm(W)×2,200mm(L)×2,800mm(H) 미만) 제작 및 설치

- 냉장고 외곽 (부피)기준으로 절단 위치 자동 인식용 센서 및 Servo 시스템 설치

- 절단날(Cutter) 불꽃 대기 중 비산 방지 가이드 설치, 안전펜스 설치

- 절단 시 발생 가능한 우레탄 분진 흡입용 덕트 설치 (절단날 주위 부착)

- 전기 및 PLC 작업 일체

그림 2. 가로축 절단설비(절단A) 외곽 (부피/길이) 정보

그림 3. 절단 모터 및 Servo 시스템 (위탁연구기관 공급)

(2) 냉장고 세로축 절단 설비 설치 공사 (B존)

- 기 설치된 컨베이어(제작업체: 이지산기/은성하이텍) 연동성 확보를 바탕으로, 냉장고 3면 (양측면 및 후면) 가로축 절단설비 설치공사

- 냉장고 이송시스템 및 절단설비 Header 모듈 (모터, 절단Cutter, Servo 등 위탁연구기관 공급) 6 Set 고정용 프레임 설치

- 냉장고 외곽 (부피)기준으로 절단 위치 자동 인식용 센서 및 Servo 시스템 설치

- 절단날(Cutter) 불꽃 대기 중 비산 방지 가이드 설치, 안전펜스 설치

- 절단 시 발생 가능한 우레탄 분진 흡입용 덕트 설치 (절단날 주위 부착)

- 전기 및 PLC 작업 일체

그림 4. 냉장고 세로축(절단B) 절단 컨셉

그림 5. 세로축 절단설비(절단B) 외곽 (부피/길이) 정보

(3) 냉장고 외판 해체·제거설비 설치공사

- 회전클램프 연동을 고려한 냉장고 외판 해체·설비 설치공사

- 해체·제거설비 모듈 (인젝터 핀, 경사 및 수직 액추에이터, 탈거용 액추에이터 등, 위탁연구기관 제공) 장착용 프레임 제작 및 설치(4,000mm×3,600mm×3,000mm 미만)

- 후면 전장박스(Electronics Box) 감지 및 (후면)외판 해체·제거 미실시(스킵장치; Skip facility) 신호 송출 시스템 설치

- 냉장고 외판 해체·제거 후 냉장고 외판 이송시스템 설치

(냉장고 외판 전용 Transfer 구동부 부품 위탁연구기관 제공)

- 외판 적재용 바스켓(or 팔레트) 제작

- 안전펜스 설치 및 지게차/작업자 통로 확보

- 전기 및 PLC 작업 일체

그림 6. 외판 해체·제거설비 공사 레이아웃

그림 7. 냉장고 외판 해체·제거설비 모듈 (위탁연구기관 공급)

(4) 제어(PLC) 프로그램 공정순서

- 제어방식

PLC 제어 (컨베이어 신호 연동, 회전클램프 연동)

- 공정순서

① 가로축 절단 (절단A공정)

그림 8. 냉장고 외판 가로축 절단 공정순서

② 세로축 절단 (B-ZONE)

그림 9. 냉장고 외판 가로축 절단 공정순서

③ 외판 해체 및 이송 (C-ZONE)

그림 10. 냉장고 외판 해체·제거 공정순서

4. 적용 범위 (기계 & 전기공사 공통)

- 본 사업은 수도권자원순환센터 내 냉장고 재활용 전처리 공정에서의 ‘진공단열재 절단 및 해체·제거 실증화공사’ 과업수행을 통한 재활용 실증화 시스템 구축을 주요 목적으로 함

- 본 사업에 대한 정의 및 범위는 ‘과업지시서’에 기재된 내용을 따름

- 본 사업은 ‘이지산기’가 수행 중인 ‘수도권자원순환센터 2차년도 실증화공사’와 연계된 사업으로써, 모든 공사 항목에 대해 상호 협업 및 이행사항을 반드시 이행해야 함을 원칙으로 함

5. 사업의 특수성

- 본 사업은 수도권자원순환센터가 수행중인 국가연구과제(과제명 :「냉장고 VIP(진공단열재) 순환이용성 확보를 위한 통합 재활용 시스템개발」)의 연구비를 이용하여 수행하는 사업임

- 이에 따라, 계약상대자(수행기관)는 ‘환경기술개발사업 운영규정 및 관련 지침’에 근거하여 본 사업 수행과정에서 발생한 지출에 대한 증빙서류 일체를 발주기관의 요청에 따라 제출하여야 함

- 본 사업에 대한 계약은 발주기관(수도권자원순환센터)과 계약상대자(수행기관)가 체결함을 원칙으로 하되, 계약금의 집행, 지급근거, 지급방법, 성과물 제출, 지출증빙 등에 대한 세부사항은 ‘환경기술개발사업 운영규정 및 관련 지침’에 근거하여 발주기관이 계약상대자에게 안내할 수 있음

- 계약금 지급계획에 근거하여 선급금(50%), 잔금(50%)를 지급함을 원칙으로 하되, 국가연구과제의 연구개발비의 집행여건에 따라 지급 시기 또는 방법이 부득이하게 변경될 수 있음

- 본 사업은 한국전자제품자원순환공제조합(수도권자원순환센터) ‘계약사무처리규정’에 따라, 입찰공고(긴급)로 수행사업자를 선정하는 것을 원칙으로 함

- 본 사업의 수행사업자로 선정된 경우, 사업의 원활한 수행과 성공적인 성과도출을 위하여 발주기관이 제시하는 협약서 및 비밀유지각서 작성을 원칙으로 하며, 신의성실의 자세로 업무협조에 적극적으로 임해야 함

- 본 사업은 절단 및 해체·제거 장치에 대한 설치/연동/시운전 완료가 가장 중요한 목표이므로, 각 계약상대자는 사업의 완성을 위해 상호 협조하여야 함

6. 공사 항목(안)

- 본 사업은 과업지시서에 명기된 모든 사항을 포함하며, 도면, 제작, 설치, 시운전 등의 활동에 드는 모든 제반(부대) 비용을 포괄함

표 4. 최종 공사 항목(안)

분류	설비명		수량
기계설비	1	절단 A공정(가로축) 설치 및 부대장치	1식
	2	절단 A공정(세로축) 설치 및 부대장치	1식
	3	해체·제거공정 설치 및 부대장치	1식
	4	환경안전장치 (분진 흡입 덕트, 안전커버등)	각 1식
	5	PLC 및 전기공사	1식
	6	기타 부대설비	각 1식
	합계

이 상 -